유비쿼터스도시건설사업

업무처리지침

2009. 6. 30.

국토해양부

목  차

제1장  총 칙	1

제1절  지침의 목적 및 의의	1

제2절  지침의 지위와 성격	1

제3절  법적근거	1

제4절  지침의 구성	2

제2장  유비쿼터스도시건설사업 세부사항	3

제1절  유비쿼터스도시건설사업의 사업구역 범위	3

제2절  유비쿼터스도시건설사업의 추진절차	3

제3절  유비쿼터스도시의 건설주체	4

제4절  유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영주체	5

제5절  유비쿼터스도시건설사업의 감리	5

제6절  유비쿼터스도시의 건설사업관리	6

제3장  유비쿼터스도시건설사업계획의 수립 및 승인	8

제1절  사업계획의 일반사항	8

제2절  사업시행자에 관한 사항	8

제3절  사업의 명칭, 범위, 목적에 관한 사항	8

제4절  사업의 시행기간 및 시행방법에 관한 사항	9

제5절  유비쿼터스도시기반시설의 구축 및 관리·운영에 관한 사항	9

제6절  유비쿼터스도시서비스의 제공에 관한 사항	10

제7절  유비쿼터스도시기술에 관한 사항	11

제8절  단계별 추진에 관한 사항	11

제9절  연도별 투자계획 및 재원조달계획에 관한 사항	12

제10절  사업추진체계에 관한 사항	12

제11절  사업추진절차에 관한 사항	12

제4장  유비쿼터스도시건설사업 실시계획의 수립 및 승인	13

제1절  실시계획의 일반사항	13

제2절  실시계획의 수립에 관한 사항	13

제3절  실시계획의 첨부 서류 및 도면에 관한 사항	14

제5장  준공의 보고 및 인가	16

제1절  준공의 일반사항	16

제2절  공사완료보고서에 관한 사항	16

제3절  준공인가 및 통보에 관한 사항	16

제6장  공공시설의 귀속	18

제1절  공공시설의 귀속에 관한 일반사항	18

제2절  공공시설의 귀속 절차에 관한 사항	18

제7장  유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영	20

제1절  유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영에 관한 일반사항	20

제2절  유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영 업무에 관한 사항	20

제8장  부칙	23

【별표 1】유비쿼터스도시건설사업의 추진 절차	24

【별표 2】유비쿼터스도시건설사업의 감리업무 절차 예시	27

【별표 3】감리 부문별 감리원 기준	28

【별표 4】감리 부문별 관계 법령 및 규정	29

【별표 5】유비쿼터스도시 건설사업관리 주요사항 예시	30

【별표 6】유비쿼터스도시서비스 분류체계 및 예시	31

【별표 7】도시기반시설물의 종류 및 관리주체	54

【별지 제1호 서식】사업시행자 지정신청서	55

【별지 제2호 서식】사업시행자 지정서	57

【별지 제3호 서식】사업시행자 지정대장	58

【별지 제4호 서식】공사완료보고서	59

【별지 제5호 서식】준공검사증명서	61

총 칙

지침의 목적 및 의의

「유비쿼터스도시건설사업 업무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)은 「유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제13조제1항 및 제14조제1항, 동법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제18조 및 제19조에 따른 유비쿼터스도시건설사업의 시행에 필요한 업무주체 및 절차 등 제반사항을 정하는데 목적이 있다.

이 지침은 유비쿼터스도시건설사업의 각 업무주체의 책임과 역할을 정하고 각 사업단계의 합리적인 절차를 규정함으로써 효율적이고 원활한 사업 시행이 될 수 있도록 지원하는데 의의가 있다.

지침의 지위와 성격

이 지침은 법 제3조 및 영 제6조, 제7조를 준용하여 유비쿼터스도시건설사업 적용대상사업 구역(이하 “사업구역”라 한다)에서 유비쿼터스도시건설사업을 시행하는 경우에 적용한다.

이 지침은 유비쿼터스도시건설사업계획(이하 “사업계획”이라 한다)의 수립 및 승인, 유비쿼터스도시건설사업 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)의 수립 및 승인, 준공검사, 공공시설의 귀속, 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영 및 기타 유비쿼터스도시건설사업 관련 업무를 일관된 체계에 따라 단계적으로 수행할 수 있도록 이에 필요한 업무의 방법과 방향을 제시해준다.

법적근거

법 제13조(유비쿼터스도시건설사업계획) ① 제12조에 따른 유비쿼터스도시건설사업의 시행자는 유비쿼터스도시계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 유비쿼터스도시건설사업계획을 수립하여야 한다.
10. 그 밖에 유비쿼터스도시건설에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

영 제18조(유비쿼터스도시건설사업계획) ③법 제13조제1항에 따른 유비쿼터스도시건설사업계획의 수립 기준과 그 밖에 필요한 사항은 국토해양부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정한다.

지침의 구성

이 지침은 총 8개의 장으로 구성되어 있으며, 제1장에서는 본 지침의 목적 및 의의, 지위와 성격, 법적근거, 구성 내용 등을 제시한다.

제2장에서는 유비쿼터스도시건설사업의 시행자(이하 “사업시행자”라 한다), 유비쿼터스도시기반시설의 관리청(이하 “유비쿼터스도시기반시설관리청”이라 한다) 등 유비쿼터스도시건설사업의 주요 업무주체의 책임과 역할을 제시한다.

제3장에서는 사업시행자가 수립하는 사업계획에 포함시켜야 하는 주요 사항과 승인에 필요한 절차 및 기준을 제시한다.

제4장에서는 사업계획 승인 후 사업시행자가 수립하는 실시계획에 포함시켜야 하는 주요 사항과 승인에 필요한 절차 및 기준을 제시한다.

제5장에서는 준공의 보고 및 인가에 관한 사항으로 공사완료보고서 작성, 준공인가 및 통보에 필요한 절차 및 기준을 제시한다.

제6장에서는 공공시설의 귀속에 관한 사항으로 공공시설의 정의 및 귀속절차, 귀속시기에 대한 주요 사항을 제시한다.

제7장에서는 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영에 대한 주요 사항을 제시한다.

제8장에서는 이 지침의 시행일을 제시한다.

유비쿼터스도시건설사업 세부사항

유비쿼터스도시건설사업의 사업구역 범위

법에 적용되는 유비쿼터스도시건설사업의 사업구역 범위는 165만 제곱미터 이상으로 한다.

행정구역상 인접한 사업구역에 대해 단계적으로 분리 개발하는 경우의 사업구역 범위 산정기준은 총 개발면적의 합을 그 기준으로 할 수 있다.

개발사업과 별개로 진행되는 구도시의 사업구역 범위 산정기준은 유비쿼터스도시서비스를 제공하기 위하여 유비쿼터스도시기반시설을 설치, 정비 또는 개량하는 범위를 그 기준으로 한다.

유비쿼터스도시건설사업의 추진절차

유비쿼터스도시 건설을 위한 유비쿼터스도시건설사업의 전반적인 추진절차는 다음과 같다.(「【별표 1】유비쿼터스도시건설사업의 추진 절차」참조)

유

비

쿼

터

스

도

시

건

설

사

업

의

시

행

종합계획

수립/확정

유비쿼터스도시

계획 수립/승인

사업시행자 지정

사업계획

수립/승인

실시계획

수립/승인

준공검사/준공검사증명서발급

유비쿼터스도시

관리·운영

대상 : 사업시행자

승인 : 법률 제14조에 따른 실시계획 승인권자

준공검사 위탁 : 시행령 제21조에 따른 기관

공고 : 관보나 공보

수립 : 국토해양부 장관(5년단위)

협의 : 중앙행정기관장 / 공청회 개최

심의 : 유비쿼터스도시위원회

공고·송부 : 관보·관계기관

수립 : 특별시장 · 광역시장 · 시장 · 군수

자문 : 위원회

승인 : 국토해양부 장관

공고·송부 : 관보·관계기관

자격 : 법률 제12조에 따른 자

승인 : 법률 제13조에 따른 사업계획 승인권자

* 유비쿼터스도시건설사업 추진 지자체 :

유비쿼터스도시사업협의회 구성운영

수립 : 사업시행자

승인 : 법률 제13조에 따른 사업계획 승인권자

협의 : 관계기관

공고·송부 : 관보나 공보·관계기관

수립 : 사업시행자

승인 : 법률 제14조에 따른 실시계획 승인권자

협의 : 관계기관

공고·송부 : 관보나 공보·관계기관

사업시행자는 효율적인 사업추진을 위하여 유비쿼터스도시건설사업의 기본구상 및 타당성조사 관리, 계약관리, 사업계획 및 실시계획 등의 인허가관리, 설계관리, 사업비 관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 사업정보관리 등 사업 전반에 대한 관리를 하여야 한다.

사업시행자는 사업의 계획·설계·발주·감리·구축·시공·사후평가 전반을 총괄하고, 감리 및 시공계약 이행에 필요한 사항을 지원, 협력하여야 하며 감리용역계약에 규정된 바에 따라 감리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·점검을 하여야 한다.

유비쿼터스도시의 건설주체

사업시행자는 유비쿼터스도시건설사업을 시행하는 업무주체로 법 제12조에 따른 자격을 갖춘 자이다.

영 제17조제1항에 따라 사업시행자로 지정받으려는 자는 다음 서류 및 도면을 법 제13조제2항에 따른 사업계획승인권자에게 제출하여야 한다.

유비쿼터스도시건설사업시행자 지정신청서【별지 제1호 서식】

유비쿼터스도시건설사업계획서(이하 “사업계획서”라 한다)

법 제12조에서 정한 유비쿼터스도시건설사업의 시행자 자격에 해당하는지 여부를 확인할 수 있는 서류

축척 2만5천분의 1 또는 5만분의 1의 위치도

사업계획서는 다음 사항의 개략적인 내용을 포함하여야 한다.

사업의 명칭 및 범위

사업의 목적 및 기본방향

사업시행자의 인적사항

사업의 시행기간

사업의 시행방법

유비쿼터스도시기반시설의 구축 및 관리·운영에 관한 사항

유비쿼터스도시서비스의 제공에 관한 사항

유비쿼터스도시기술에 관한 사항

단계별 추진에 관한 사항

연도별 투자계획 및 재원조달계획

사업추진체계에 관한 사항

사업추진절차에 관한 사항

사업계획승인권자는 제출된 서류 및 도면에 기재사항이 누락되거나 그 내용이 분명하지 아니한 때에는 영 제17조제2항에 따라 30일 이내에 지정을 신청한 자에게 보완을 요구할 수 있다.

영 제17조제2항에 따라 사업시행자를 지정하는 경우, 사업계획승인권자는 유비쿼터스도시건설사업시행자 지정서【별지 제2호 서식】를 신청한 자에게 교부하고, 유비쿼터스건설사업시행자 지정대장【별지 제3호 서식】을 작성·관리하여야 한다.

유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영주체

유비쿼터스도시기반시설관리청은 해당 유비쿼터스도시건설사업의 준공 후 유비쿼터스도시기반시설을 관리·운영하는 업무주체로 이에 따른 세부 절차 및 구성은 법 제19조 및 지침 제7장에서 정하는 기준에 따른다.

유비쿼터스도시기반시설관리청은 영 제22조제1항에 따라 유비쿼터스도시기반시설의 효율적인 유지 보수 및 기능 향상에 관한 사항, 유비쿼터스도시기반시설의 연계·통합관리를 위한 업무주체 간의 협력적 역할 분담에 관한 사항, 유비쿼터스도시기반시설의 관리운영비 조달 및 절감에 관한 사항을 고려하여 관리·운영하여야 한다.

기타 유비쿼터스도시기반시설 관리·운영에 관한 사항은 유비쿼터스도시기반시설 관리·운영지침을 참조한다.

유비쿼터스도시건설사업의 감리

“유비쿼터스도시건설사업의 감리”(이하 “감리”라 한다)는 감리기관이 당해 사업의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 구축 및 시공되는지를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전관리 및 환경관리 등에 대해 절차에 따라 기술지도를 하는 것이다.(「【별표 2】 유비쿼터스도시건설사업의 감리업무 절차 예시」)

감리는 공사의 규모 및 특성에 따라 계약단위별 공사 전부에 대하여 감리를 시행하거나 전문성을 고려하여 각 공종 별로 감리를 수행할 수 있다.

감리는 유비쿼터스도시 건설공사 감리 부문, 유비쿼터스도시 정보통신공사 감리 부문, 유비쿼터스도시 정보시스템구축 감리 부문으로 구분하여 수행할 수 있다.

각 부문은 상호 간 역할, 업무, 인원을 명확히 하고, 감리원을 통하여 사업 정보공유 및 감리 점검 체계 수립이 공정 진행에 따라 시기적절하게 이루어질 수 있도록 하여야 한다.(「【별표 3】 감리 부문별 감리원 기준」)

감리의 각 부문별 세부 절차는 관계 법령 및 규정에 따른다.(「【별표 4】 감리 부문별 관계 법령 및 규정」)

유비쿼터스도시의 건설사업관리

"유비쿼터스도시 건설사업관리"(이하“사업관리”라 한다)는 유비쿼터스도시건설사업의 기본구상 및 타당성조사 관리, 계약관리, 설계관리, 사업비 관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 사업정보관리 등 사업 전반에 대한 관리업무를 수행하는 것이다.

사업시행자는 효율적인 사업추진을 위하여 사업 전반에 대한 관리 업무를 수행하여야 한다.(「【별표 5】유비쿼터스도시 건설사업관리 주요사항 예시」)

사업시행자는 필요한 경우, 사업관리 업무의 전문지식과 기술능력을 갖춘 자를 지정하여 사업시행의 전부 또는 일부에 대하여 사업관리 업무를 위탁 할 수 있다.

사업시행자 또는 사업관리를 위탁받아 수행하는 자가 수행하여야 할 사업관리 업무의 내용은 다음과 같다.

사업의 기본구상 및 타당성 조사, 수립, 운영 및 조정 등에 관한 사업관리

설계자, 시공자 등 선정과 관련한 지원업무와 각종 설계변경, 클레임 및 분쟁에 관한 업무지원 등 계약 및 설계관리

사업 시행단계별, 사업예산 및 사업비 운영의 적정성 검토, 조정 등에 관한 사업비 관리

사업 시행단계별, 공정의 계획, 운영 및 조정 등에 관한 공정관리

사업 시행단계별, 품질과 환경에 관한 제반 기준 및 계획의 검토, 조정 등과 관련된 품질관리

사업 시행단계별, 재해예방 및 건설안전 확보를 위한 제반기준 및 계획의 검토, 조정 등에 관한 안전관리

사업 시행단계별, 각종 문서, 도면, 기술자료 등의 체계적인 축적 및 관리 등에 관한 사업정보관리

유비쿼터스도시건설사업계획의 수립 및 승인

사업계획의 일반사항

사업계획은 사업시행자가 유비쿼터스도시계획에 따라 해당 사업구역을 대상으로 유비쿼터스도시기반시설의 구축 및 관리·운영에 관한 사항, 유비쿼터스도시서비스의 제공에 관한 사항, 유비쿼터스도시기술에 관한 사항 등 법 제13조제1항 각 호의 내용을 일관된 체계로 종합화하여 단계적으로 집행할 수 있도록 하는 계획이다.

사업계획의 수립 및 승인에 관한 절차는 법 제13조와 영 제18조에 따르며 승인에 관한 특례는 법 제17조제1항에 따른다.

사업시행자에 관한 사항

사업시행자는 다음 인적 사항을 표시하여야 한다.

성명 (법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)

주소 (법인인 경우는 주된 사무소의 소재지)

주민등록번호 (법인인 경우는 법인등록번호)

사업시행자는 사업시행자의 재무상태, 자금조달능력, 시행능력 및 경험 등을 알 수 있는 내용을 기재하고 근거자료를 함께 별표하여야 한다.

사업시행자가 법 제12조제1항제1호에서 제5호까지의 자 중 둘 이상의 자가 유비쿼터스도시건설사업을 시행할 목적으로 출자하여 설립한 「상법」에 따른 회사의 경우에는 출자자의 구성 및 출자비율을 기재하여야 한다.

사업의 명칭, 범위, 목적에 관한 사항

사업시행자는 유비쿼터스도시계획을 참조하고 다음 사항을 고려하여 사업의 명칭을 정하여야 한다.

사업의 명칭은 원칙적으로 사업구역이 위치한 시·군 단위 이하의 행정구역 명을 중심으로 하며, 중복 또는 혼동방지 등 특별한 사유가 있는 경우에는 예외로 한다.

기존 개발사업과 병행하여 유비쿼터스도시건설사업을 추진하는 경우에는 개발사업 명칭을 따르도록 한다.

사업의 명칭은 사업시행자 및 사업구역의 특성 등을 고려하여 다른 유비쿼터스도시와 구별이 될 수 있도록 하여야 한다.

사업시행자는 유비쿼터스도시계획을 참조하여 사업구역의 범위를 명시하여야 한다.

사업시행자는 사업의 필요성, 특성 및 효과 등 사업추진에 따른 당위성을 구체적으로 기술한 사업의 목적을 명시하여야 하며 사업의 목적을 달성하기 위한 핵심적인 실행방안을 정리한 사업의 기본 방향을 작성하여야 한다.

사업의 시행기간 및 시행방법에 관한 사항

사업시행자는 사업구역의 시행면적, 공사의 난이도 및 공사비의 규모, 계획표 등을 감안하여 사업의 시행기간과 시행방법을 명시하여야 한다.

사업의 시행기간은 통상적으로 사업계획의 수립시점에서부터 준공검사를 거쳐 해당 유비쿼터스도시건설사업의 완료 공고일까지로 한다.

사업의 시행방법은 법 제3조 및 영 제7조에서 정한 택지개발사업, 도시개발사업 등과 병행하여 시행할 수 있다.

사업을 개발사업과 병행하여 시행하는 경우에는 개발사업의 시행기간을 고려하여 사업의 시행기간을 산정하여야 한다.

유비쿼터스도시기반시설의 구축 및 관리·운영에 관한 사항

사업시행자는 지역적 특성 및 시설의 연계와 통합을 고려하고 시장·군수와 협의하여 유비쿼터스도시기반시설을 선정하여야 한다.

유비쿼터스도시기반시설은 법 제2조제3호에 따라 지능화된 공공시설, 정보통신망, 유비쿼터스도시의 관리·운영에 관한 시설로 구분 할 수 있다.

지능화된 공공시설이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 기반시설 또는 같은 조 제13호에 따른 공공시설에 건설·정보통신 융합기술을 적용한 시설을 말하며 다음 사항을 명시하여야 한다.

지능화된 공공시설의 종류 및 명칭에 관한 사항

지능화된 공공시설의 위치 및 규모에 관한 사항

지능화된 공공시설에 적용되는 기술 요소에 관한 사항

지능화된 공공시설의 관리·운영에 관한 사항

정보통신망은 지능화된 공공시설과 관리·운영시설 사이에 정보를 전송하기 위한 유비쿼터스도시기반시설을 말하며 다음 사항을 명시하여야 한다.

정보통신망의 수요에 관한 사항(각 유비쿼터스도시서비스 제공에 필요한 사항)

정보통신망의 도입에 관한 사항(자가망·임대망, 유선망·무선망·센서망 등의 사항)

정보통신망의 설계 및 구축에 관한 사항

정보통신망의 관리·운영에 관한 사항

유비쿼터스도시의 관리·운영에 관한 시설은 유비쿼터스도시를 관리 및 운영하기 위한 시설로 유비쿼터스도시 통합운영센터 또는 그 밖에 이와 유사한 기능을 수행하는 시설을 말하며 다음 사항을 명시하여야 한다.

시설의 위치 및 규모에 관한 사항

시설의 설계 및 구축에 관한 사항

시설의 관리·운영을 위한 장비 및 기술에 관한 사항

시설의 관리·운영에 관한 기타 사항

유비쿼터스도시서비스의 제공에 관한 사항

사업시행자는 해당 사업구역의 특성 및 유비쿼터스도시기반시설과의 연계성 등을 충분히 검토하여 유비쿼터스도시서비스 제공계획을 수립하여야 한다.

사업시행자는 제공하고자 하는 각각의 유비쿼터스도시서비스에 대해 편리성, 구현가능성, 공익성, 경제성, 안전성, 시급성, 중요성 등 해당 사업구역의 특성을 고려하여 유비쿼터스도시서비스를 선정하여야 한다.(「【별표 6】 유비쿼터스도시서비스 분류체계 및 예시」)

사업시행자는 각각의 유비쿼터스도시서비스에 대해 서비스의 구분, 단위서비스명, 주요 이용자 및 제공범위, 서비스 요구사항, 서비스제공자, 서비스운영자, 관련기관 등의 개략적인 내용을 기술하여야 한다.

유비쿼터스도시기술에 관한 사항

사업시행자는 정보의 호환성, 연계성, 확장성 및 유비쿼터스 관련 기술의 발전을 고려하여 유비쿼터스도시기술을 명시하여야 한다.

유비쿼터스도시기술은 법 제20조제1항에서 정한 기준을 따르며 유비쿼터스도시종합계획에서 유비쿼터스도시기술의 표준을 정한 경우에는 그에 따라야 한다.

사업시행자는 유비쿼터스도시기술을 이용한 정보의 수집·전달·가공·제공시 법 제21조에 해당하는 개인정보 보호, 법 제22조에 해당하는 유비쿼터스도시기반시설의 보호에 관한 사항을 따라야 한다.

「공공기관의 개인정보보호에 관한 법률」, 「전자정부법」, 「국가정보원법」에 따른 관련 기준에 따라 유비쿼터스도시기반시설 설치 공공정보서비스 제공 및 관리에 따른 보안관리에 관한 사항을 계획하여야 한다.

단계별 추진에 관한 사항

사업시행자는 일관성 있는 사업시행을 위하여 사업구역의 지역적 특성, 사업에 소요되는 재원의 규모, 자금사정, 초기건설비, 유지관리비, 시설의 수명, 할인율, 공사기간, 공사 및 시설확장의 난이도 등을 고려하여 단계별 추진 목표 및 전략을 작성하여야 한다.

사업시행자는 각 단계별 사업시행 기간, 사업 범위 및 내용, 중점 추진 방안, 소요재원과 재원운영 방안 등 사업관리에 관련된 사항을 작성하여야 하며, 특히 각 단계의 종료시점에 단계별 목표 달성 여부를 판단할 수 있어야 한다.

연도별 투자계획 및 재원조달계획에 관한 사항

사업시행자는 사업시행 기간, 공종별 자금소요, 위험에 대한 대비 및 재원조달 능력 등을 종합적으로 감안하여 연도별 투자계획을 수립하여야 한다.

사업시행자는 예정된 단계별, 연도별 시행계획에 따라 사업이 완료될 수 있도록, 비용부담 및 분담 방안, 출자자의 재원조달 능력, 수익모델 등을 감안하여 현실성을 갖춘 재원조달계획을 수립하여야 한다.

비용부담 및 분담은 입주민의 수익이나 권리의 정도를 감안하고, 개발사업과 병행하여 시행하는 경우에는 조성원가 상승에 따른 입주민의 부담, 정부시책 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

비용부담은 국가, 지방자치단체, 공공기관 사업시행자, 민간 사업시행자 등으로 구분하여 정확히 명시하여야 한다.

사업추진체계에 관한 사항

사업시행자는 유비쿼터스도시건설사업을 추진할 조직체계를 명시하여야 한다.

사업시행자는 해당 지방자치단체가 구성·운영하는 유비쿼터스도시사업협의회와의 협조체계를 명시하여야 한다.

사업추진절차에 관한 사항

사업시행자는 사업계획 승인 이후 유비쿼터스도시건설사업을 추진하기 위한 행위절차를 중심으로 사업추진절차를 명시하여야 한다.

유비쿼터스도시건설사업 실시계획의 수립 및 승인

실시계획의 일반사항

실시계획은 사업시행자가 사업계획의 내용과 일관성을 유지하여야 하며 실현가능성, 해당지역의 입지여건, 운영의 용이성 및 유연성 등을 고려하여 구체적으로 수립하는 계획이다.

실시계획의 수립 및 승인에 관한 절차는 법 제14조에 따르며 승인에 관한 특례는 법 제17조제1항에 따른다.

실시계획의 승인신청 시, 법 제15조에 따라 다른 법률에 따른 인·허가 등의 의제처리 할 경우에는 해당 법률에서 규정한 개략설계도서 등 관련 서류를 별표하여 제출하여야 한다.

실시계획의 수립에 관한 사항

사업시행자는 사업계획을 참조하여 사업의 명칭 및 범위, 목적 및 기본방향, 시행자에 관한 사항, 사업의 시행기간, 사업의 시행방법, 단계별 추진계획, 추진체계, 추진절차 등을 작성하고 이에 대한 변경이 있을 경우 변경사항을 명시하여야 한다.

사업시행자는 사업계획을 참조하여 연도별투자계획 및 재원조달계획에서 시기 및 주체 등의 세부 사항을 구체적으로 작성하여야 한다.

사업시행자는 유비쿼터스도시기반시설의 구축 및 관리·운영에 관해 사업계획에서 정해진 사항을 구체화하고, 법 제18조에 따라 무상귀속 여부를 판단하는 등 유비쿼터스도시기반시설을 효율적으로 관리·운영하기 위한 방안 및 관리·운영주체를 구체적으로 작성하여야 한다.

사업시행자는 유비쿼터스도시서비스의 제공에 관해 사업계획에서 정해진 단위서비스의 기능을 구체화하여야 한다.

사업시행자는 유비쿼터스도시기술에 관해 사업계획과 단위서비스규격서에서 정해진 단위서비스를 위한 유비쿼터스도시기술의 적용계획을 구체적으로 작성하여야 한다.

사업시행자는 유비쿼터스도시기술에 관해 사업계획에서 정해진 유비쿼터스도시기반시설을 구축하고 관리·운영하기 위한 유비쿼터스도시기술의 적용계획을 구체적으로 작성하여야 한다.

사업시행자는 법 제18조제1항에 따라 무상귀속 될 공공시설의 귀속 및 대체에 관한 세부적인 내역을 작성하여 실시계획의 내용에 포함하여야 한다.

사업시행자는 영 제19조에 따라 전자문서를 포함한 서류 및 도면을 별표하여야 한다.

실시계획의 첨부 서류 및 도면에 관한 사항

사업시행자는 사업구역의 위치도를 축척 2만5천분의 1 또는 5만분의 1 이상의 지형도를 사용하여 작성하여야 한다.

사업시행자는 실시계획 평면도 및 개략설계도서를 다음 사항을 고려하여 작성하여야 한다.

실시계획 평면도 및 개략설계도서는 사업계획 등 상위계획에서 제시한 서비스의 연계성·확장성·호환성을 고려하여야 한다.

개략설계도서는 유비쿼터스도시기반시설의 건설을 위한 건설공사 부문, 정보통신망의 구축을 위한 정보통신공사 부문, 운영시설 및 유비쿼터스도시서비스제공을 위한 정보시스템구축 부문으로 구분하여야 한다.

개략설계도서의 건설공사 부문은 「건설기술관리법」제23조의2 및 동법 시행규칙 제14조의2에 따라 설계도면, 사업시행자가 특히 필요하다고 인정한 부대도면 및 그 밖의 관련서류를 포함하여야 한다.

개략설계도서의 정보통신공사 부문은 「정보통신공사업법」제2조제8호에 따라 공사에 관한 계획서, 설계도면 및  그 밖의 관련서류를 포함하여야 한다.

개략설계도서의 정보시스템구축 부문은 「정보시스템의 효율적 도입 및 운영 등에 관한 법률」제7조에 따른 지침을 고려하여야 한다.

사업시행자는 실시계획 작성 시점을 기준으로 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 개략적인 설치비용 계산서(사업시행자가 국가 및 지방자치단체가 아닌 경우)를 작성하여야 한다.

사업시행자는 실시계획의 수립 및 승인을 위해 필요한 경우 관계 행정기관의 장과 협의에 필요한 서류를 별표하여야 한다.

준공의 보고 및 인가

준공의 일반사항

준공은 국가 또는 지방자치단체가 유비쿼터스도시건설사업을 끝내거나 국가 또는 지방자치단체를 제외한 사업시행자의 경우 실시계획승인권자에게 법 제16조에 따라 공사완료보고서를 작성, 제출하여 준공검사증명서를 발급받는 때이다.

준공검사에 대한 절차는 법 제16조 및 영 제21조에 따르며 준공에 관한 특례는 법 제17조제2항에 따른다.

공사완료보고서에 관한 사항

국가 또는 지방자치단체를 제외한 사업시행자의 경우 유비쿼터스도시건설사업의 공사 및 구축을 완료한 때에는 공사완료보고서【별지 제4호 서식】를 작성하여야 한다.

이 경우 사업시행자는 다음 사항을 공사완료보고서에 별표하여야 한다.

준공조서(준공사진 포함)

준공설계도서

법 제16조제3항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의에 필요한 서류 및 도면

법 제18조에 따른 유비쿼터스도시기반시설의 귀속조서 및 도면

그 밖에 준공검사에 필요한 서류(공간정보 전자문서 등 포함)

준공인가 및 통보에 관한 사항

실시계획승인권자는 공사완료보고서의 확인 결과 해당 사업구역이 실시계획대로 구축되었다고 인정하는 경우에는 준공검사증명서【별지 제5호 서식】를 작성하여 사업시행자에게 교부하고 공사완료를 관보나 공보에 공고하여야 한다.

실시계획승인권자는 효율적인 준공검사를 위하여 필요한 때에는 관계행정기관·「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관·연구기관·기타 전문기관 등에 의뢰하여 준공검사를 실시할 수 있다.

실시계획승인권자는 다음 사항을 포함하여 공사완료를 공고하여야 한다.

사업의 명칭

사업시행자

사업시행구역의 위치

준공일자

준공된 유비쿼터스도시기반시설 및 유비쿼터스도시서비스의 내용

사업시행자가 유비쿼터스도시건설사업을 준공하였을 때에는 법 제15조제1항 각 호에 해당하는 인·허가 등에 따른 해당 사업의 준공에 관한 검사·인가·신고 또는 확인 등을 받은 것으로 본다.

사업시행자가 다른 법률에 따른 사업을 시행하면서 법 제17조제1항에 따른 사업의 준공검사를 받았을 때에는 법 제16조에 따라 준공검사를 받은 것으로 본다.

공공시설의 귀속

공공시설의 귀속에 관한 일반사항

사업시행자가 실시계획에서 무상귀속으로 정하여진 유비쿼터스도시기반시설을 설치하는 경우 이를 공공시설로 본다.

구분	국가 또는 지방자치단체가 사업시행자인 경우	국가 또는 지방자치단체 이외의 자가 사업시행자인 경우
무상귀속	종전 공공시설은 사업시행자에게 무상 귀속	용도 폐지되는 관리청은 새로 설치된 유비쿼터스도시기반시설의 설치비용 상당하는 범위에서 사업시행자에게 무상으로 양도
귀속시기	사업을 끝내고 해당 관리청에 종류, 세부목록을 통보한 때부터 귀속	사업시행자에게 준공검사증명서를 교부한 때부터 관리청에 귀속

사업시행자가 새로 설치하거나 기존의 공공시설을 대체하여 설치하는 유비쿼터스도시기반시설의 무상귀속에 대하여는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제65조를 준용한다.

공공시설 준공 후 공공시설의 관리청에 귀속될 때까지 특별한 규정이 없는 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 관리한다.

공공시설의 귀속 절차에 관한 사항

공공시설의 귀속에 대하여는 다음 절차를 따른다.

사업계획승인권자는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제65조제3항에 따라 공공시설의 관리청 의견을 들어야 한다.(「【별표 7】도시기반시설물의 종류 및 관리주체」)

사업시행자는 관리청에 무상귀속될 공공시설의 종류와 세목을 실시계획에 반영하여야 하며 공공시설의 적정공사비 산정 및 원가 계산은 조달청 「공사 원가계산 제비율 적용기준」을 참고 한다.

사업시행자는 준공 이전에 공공시설의 관리청에 합동점검을 요청하여야 하며 해당 관리청은 준공 이전까지 합동점검을 완료하여 그 결과를 사업시행자에게 통보하여야 한다.

사업시행자는 합동점검 시 지적된 사항을 이행한 후 해당 공공시설의 관리청에 통보하고 해당 관리청에서 이의가 없는 때에는 귀속이 완료된 것으로 본다.

해당 공공시설의 관리청은 공공시설의 귀속 이후에 발생하는 관리하자에 대한 유지보수를 담당하여야 한다.

유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영

유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영에 관한 일반사항

유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영이란 유비쿼터스도시기반시설관리청이 유비쿼터스도시기반시설을 대상으로 영 제22조제1항각호의 사항을 고려하여 유지관리업무를 수행하는 것이다.

유비쿼터스도시건설사업을 추진하려는 지방자치단체의 장은 법 제19조제5항에 따라 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영 계획을 유비쿼터스도시기반시설관리청과 협의하여 수립할 수 있으며, 이때 법 제19조제6항에 따라 관리·운영 계획의 수립 및 그 밖에 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영에 관하여 필요한 사항을 조례로 정할 수 있다.

사업시행자는 사업계획 및 실시계획 수립 시 유비쿼터스도시계획의 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영 부문을 참조하고 유비쿼터스도시기반시설 구축 시 필요한 사항에 대해서 유비쿼터스도시기반시설관리청 및 유비쿼터스도시사업협의회와 협의할 수 있다.

유비쿼터스도시기반시설관리청은 법 제19조제1항에 따라 다른 법률에 따라 관리청이 정하여지지 않은 경우 시장·군수로 하며 법 제19조제3항 및 영 제22조제3항에 따라 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위탁받은 기관을 포함한다.

유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영 업무에 관한 사항

유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영 업무는 다음과 같다.

상황실 운영 : 운영센터에서 중앙집중식으로 현장의 지능화된 공공시설 및 통신망을 통한 교통, 방범·방재, 기상정보 등의 수집상황 및 운영센터 자체의 운영현황을 감시하고 통제한다.

변경관리 : 표준화된 방법과 절차를 사용하여, 새로운 유비쿼터스도시서비스의 도입, 운영센터, 통신망 및 지능화된 공공시설의 재설계 및 구성요소들에 대한 변경, 단위기술선정 검토 등이 업무에 어떤 영향을 미치는지를 검토하여 서비스 품질에 대한 악영향을 최소화하고 모든 변경이 효율적이고 성공적으로 처리되는지를 확인한다.

장애관리 : 자연 재해에 의한 장애, 기술적 요인에 의한 장애와 운영자의 실수 또는 악성코드의 침투와 같은 인위적 요소에 의한 운영하드웨어, 운영소프트웨어 등의 장애와 통신망 및 지능화된 공공시설의 장애를 관리한다.

백업관리 : 악성코드에 의한 데이터의 손실 또는 재해로 인한 장비의 훼손 등에 대비하여 일정한 주기로 데이터를 보조기억장치 등에 복사하고 관리한다.

재해복구관리 : 유비쿼터스도시기반시설에 대하여 재해가 발생하는 경우를 대비하여, 이의 빠른 복구를 통해 업무에 대한 영향을 최소화하기 위한 재해복구계획을 수립하고 관리한다.

사용자지원관리 : 현장지원, 사용자 교육, 유지관리 등 사용자 지원 일원화 창구로써 현장 업무 체계를 마련하여 지원한다.

보안관리 : 운영센터, 통신망 및 지능화된 공공시설의 물리적 훼손을 방지하고 정보의 유출과 같은 보안사고를 예방하는 것으로, 운영센터 내 주요지역, 통신망 및 지능화된 공공시설에 대한 접근통제, 문서관리규정과 같은 관리적 개념의 보안관리, 장비의 보호 및 출입통제와 같은 물리적 보안관리, 방화벽을 통한 해커의 침입방지, 악성코드의 차단과 같은 기술적 보안관리로 이루어진다.

시설관리 : 안전점검을 통하여 운영센터, 통신망 및 지능화된 공공시설의 고장이나 파손여부 또는 고장ㆍ파손이 예상되는 상황을 파악하여 조직체계에 따라 상부에 보고하여야 하며, 고장ㆍ파손의 경우 보수작업을 수행하도록 한다.

성능관리 : 유비쿼터스도시서비스들의 효율 및 응답속도 등을 최적으로 유지제공하기 위하여 낮은 성능을 보이는 요소를 찾아 성능 개선을 수행한다.

이 밖에 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영 업무는 다음을 포함한다.

예산관리 : 유비쿼터스도시기반시설 운영에 실제 소요되는 비용 등을 계산하여 예산을 수립하고 산정된 예산을 기반으로, 장기적으로 유비쿼터스도시기반시설 관리·운영을 위해 필요한 예산 투자 계획도 함께 수립한다.

집행관리 : 관리주체간의 협력적 역할 분담에 관한 계획과 관리운영비 조달 및 절감에 관한 계획을 수립, 집행하여야 한다.

연계통합관리 : 유비쿼터스도시기반시설이 유비쿼터스도시서비스를 효율적으로 제공하고 대형사고, 재난재해 등 유비쿼터스도시기반시설의 기능에 영향을 미치는 상황 발생 시 이를 해결할 수 있도록 지방자치단체의 장과 상시 연계체계를 구축하여야 한다.

안전관리 : 유비쿼터스도시기반시설의 임의 철거·이전 또는 손괴를 예방하기 위한 필요한 조치를 하여야 한다.

기타 효율적인 관리·운영을 위해 필요하다고 인정하는 사항

기타 유비쿼터스도시기반시설의 관리·운영에 필요한 세부사항은 「유비쿼터스도시기반시설 관리·운영 지침」에 따른다.

제8장 부칙

8-1. 이 지침은 2009년  7월  20일부터 시행한다.

8-2. 법 제3조제5호에서 정한 행정중심복합도시건설사업을 시행하는 행정중심복합도시건설청장은 이 지침에 따른 시장․군수로 본다.

8-3.  「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 훈령/예규/고시/공고/지시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령/예규/고시/공고/지시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 7월 19일까지로 한다.

【별표 1】 유비쿼터스도시건설사업의 추진 절차

유비쿼터스도시건설사업의 추진 절차

사업계획 수립			사업시행자
사업계획 협의			유비쿼터스도시위원회		<법 제23조1항> 국가가 시행하는 유비쿼터스도시건설 사업에 관한 사항
			유비쿼터스도시협의회		<법 제24조1항> 일반 사업시행자가 수립하는 사업계획 및 실시계획에 관한 사항
사업계획서 제출			사업시행자		<영 제17조1항> 법 제12조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 유비쿼터스도시건설사업의 시행자로 지정받으려는 자는 법 제13조제1항 각 호의 사항이 포함된 유비쿼터스도시건설사업계획서(이하 “사업계획서”라 한다)를 법 제13조제2항에 따른 사업계획승인권자(이하 “사업계획승인권자”라 한다)에게 제출하여야 한다.
					<사업자지정신청서내용> 1. 유비쿼터스도시건설사업시행자 지정신청서 2. 유비쿼터스도시건설사업계획서(이하 “사업계획서”라 한다.) 3. 법 제12조제1항 각호 및 법 제12조제2항의 어느 하나에 해당하는지 여부를 확인할 수 있는 서류 4. 규정·정관 또는 시행규정 5. 축척 2만5천분의 1 또는 5만분의 1의 위치도
					<사업계획서의내용> 1. 사업의 명칭 및 범위 2. 사업의 목적 및 기본방향 3. 사업시행자 4. 사업의 시행기간 5. 사업의 시행방법 6. 연도별 투자계획 및 재원조달계획(비용분담방안을 포함한다) 7. 유비쿼터스도시기반시설의 구축 및 관리·운영에 관한 사항 8. 유비쿼터스도시서비스의 제공에 관한 사항 9. 유비쿼터스도시기술에 관한 사항 10. 단계별 추진에 관한 사항 11. 사업추진체계에 관한 사항 12. 사업추진절차에 관한 사항
관계 중앙 행정기관의 장과 협의			사업계획 승인권자		<법 제13조3항> 국토해양부장관(국가가 사업시행자인 경우를 말한다)이나 지방자치단체의 장이 제1항에 따라 사업계획을 수립하거나 사업계획승인권자가 제2항에 따라 사업계획을 승인하는 경우에는 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다.
사업계획 승인					<영 제17조2항> 제1항에 따라 사업계획서를 받은 사업계획승인권자는 사업계획서를 받은 날부터 30일 이내에 사업시행자의 지정 여부를 결정하여 지정을 신청한 자에게 알려야 한다.
			시장ㆍ군수		<법 제13조2항> 일반 사업 시행자일 경우
			국토해양부장관		<법 제13조2항> 둘 이상의 특별시ㆍ광역시 또는 도의 관할구역에 속하는 경우
			도지사		<법 제13조2항> 같은 도의 관할구역에 속하는 경우
고시			사업계획 승인권자		<법 제13조4항> 국토해양부장관(국가가 사업시행자인 경우를 말한다)이나 지방자치단체의 장이 제1항에 따라 사업계획을 수립하거나 사업계획승인권자가 제2항에 따라 사업계획을 승인한 경우에는 사업계획의 수립 또는 승인을 관보나 공보에 공고하여야 하며, 국토해양부장관이나 도지사가 사업계획을 승인한 경우에는 해당 사업구역을 관할하는 시장ㆍ군수에게 관계 서류를 송부하여야 한다.
실시계획 수립			사업시행자
실시계획 협의			유비쿼터스도시위원회		<법 제23조1항> 국가가 시행하는 유비쿼터스도시건설 사업에 관한 사항
			유비쿼터스도시협의회		<법 제24조1항> 일반 사업시행자가 수립하는 사업계획 및 실시계획에 관한 사항
실시계획서 제출			사업시행자		<실시계획서의내용> 1. 사업의 명칭 및 범위 2. 사업의 목적 및 기본방향 3. 사업시행자 4. 사업의 시행기간 5. 사업의 시행방법 6. 연도별 투자계획 및 재원조달계획(비용분담방안을 포함한다) 7. 유비쿼터스도시기반시설의 구축 및 관리·운영에 관한 사항 8. 유비쿼터스도시서비스의 제공에 관한 사항 9. 유비쿼터스도시기술에 관한 사항 10. 단계별 추진에 관한 사항 11. 사업추진체계에 관한 사항 12. 사업추진절차에 관한 사항 13. 공공시설의 귀속 및 대체에 관한 사항
					<별표서류및도면> 1. 사업시행지역의 위치도 및 지적도 2. 실시계획 평면도 및 개략설계도서 3. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설 설치비용 계산서 및 사업시행자에게 귀속ㆍ양도될 기존 공공시설의 계산서(사업시행자가 국가 및 지방자치단체가 아닌 경우만 해당한다) 4. 관계 행정기관의 장과의 협의에 필요한 서류
관계 중앙 행정기관의 장과 협의			사업계획 승인권자		<법 제14조3항> 국토해양부장관(국가가 사업시행자인 경우를 말한다)이나 지방자치단체의 장이 제1항에 따라 실시계획을 수립하거나 실시계획승인권자가 제2항에 따라 실시계획을 승인할 때에는 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다.
실시계획 승인			시장ㆍ군수		<법 제14조2항> 일반 사업시행자일 경우
			국토해양부장관		<법 제14조2항> 둘이상의특별시ㆍ광역시 또는 도의 관할구역에 속하는 경우
			도지사		<법 제14조2항> 같은 도의 관할구역에 속하는 경우
고시			실시계획 승인권자		<법 제14조4항> 국토해양부장관(국가가 사업시행자인 경우를 말한다)이나 지방자치단체의 장이 제1항에 따라 실시계획을 수립하거나 실시계획승인권자가 제2항에 따라 실시계획을 승인한 경우에는 실시계획의 수립 또는 승인을 관보나 공보에 공고하여야 하며, 국토해양부장관 또는 도지사가 실시계획을 승인한 경우에는 해당 사업구역을 관할하는 시장ㆍ군수에게 관계 서류를 송부하여야 한다.
공사 착공			사업시행자
공사 완료			사업시행자
공사완료 보고서			사업시행자		<공사완료보고서내용> 1. 준공조서(준공설계도서 및 준공사진을 포함한다) 2. 법 제16조제3항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의에 필요한 서류 및 도면 3. 법 제18조에 따른 유비쿼터스도시기반시설의 귀속조서 및 도면 4. 그 밖에 준공검사에 필요한 서류
준공검사			실시계획 승인권자		<영 제21조3항> 실시계획승인권자는 효율적인 준공검사를 위하여 필요하면 관계 행정기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 연구기관, 그 밖의 전문기관 등에 의뢰하여 준공검사를 할 수 있다. <영 제21조4항> 실시계획승인권자는 공사완료보고서의 내용에 포함된 공공시설을 인수하거나 관리하게 될 관리청에게 준공검사에 참여할 것을 요청할 수 있으며, 요청을 받은 관리청은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.
준공검사 증명서 발급			실시계획 승인권자
고시			실시계획 승인권자		<공사완료 공고 내용> 1. 사업의 명칭 2. 사업시행자 3. 사업시행구역의 위치 4. 준공일자 5. 준공된 유비쿼터스도시기반시설 및 유비쿼터스도시서비스의 내용

【별표 2】 유비쿼터스도시건설사업의 감리업무 절차 예시

유비쿼터스도시건설사업의 감리업무 절차 예시

【별표 3】 감리 부문별 감리원 기준

감리 부문별 감리원 기준

건설공사 감리 부문

구분	기준 및 자격
수석감리사	1. 감리사 등급 기준을 충족한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자
감리사	1. 기술사 또는 건축사로 기사 자격을 취득 후 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 2. 산업기사 자격 취득 후 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자
감리사보	1. 기사 자격을 취득한 자 2. 산업기사 자격 취득 후 2년 이상 건설공사업무를 수행한 자

정보통신공사 감리 부문

구분	기준 및 자격
특급감리원	1. 기술사
고급감리원	1. 기사자격(기능장을 포함한다. 이하 같다)을 취득한 후 6년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 산업기사자격을 취득한 후 9년 이상 공사업무를 수행한 자 3. 기능사자격을 취득한 후 14년 이상 공사업무를 수행한 자
중급감리원	1. 기사자격을 취득한 후 3년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 산업기사자격을 취득한 후 6년 이상 공사업무를 수행한 자 3. 기능사자격을 취득한 후 12년 이상 공사업무를 수행한 자
초급감리원	1. 산업기사 이상의 자격을 취득한 자 2. 기능사자격을 취득한 후 6년 이상 공사업무를 수행한 자

정보시스템구축 감리 부문

구분	기준 및 자격
수석감리원	1. 국가공인 정보시스템 감리사 2. 정보처리 직무분야 기술사
감리원	1. 고급기술자(정보처리 분야) 이상 - 기사+정보처리 경력7년 이상 - 산업기사+정보처리 경력10년 이상 2.감리 유사 자격 - 한국전산원 감리인 인정서 취득자 - 정보통신기술사 - 정보보호전문가 1급(단, 정보처리 경력5년 이상) - CISA 정식자격자(단, 정보처리 경력5년 이상

【별표 4】 감리 부문별 관계 법령 및 규정

감리 부문별 관계 법령 및 규정

구분	건설공사	정보통신공사	정보시스템구축
관련법	「건설기술관리법」	「정보통신공사업법」	「정보시스템의 효율적 도입 및 운영 등에 관한 법률」
공사 대상	「건설기술관리법」제27조 및 동법 시행령 제50조에 따른 건설공사	「정보통신공사업법」시행령 제8조에 따른 정보통신공사	「정보시스템의 효율적 도입 및 운영 등에 관한 법률」 시행령 제11조에 따른 정보시스템구축 사업
감리업무 수행기준	국토해양부 고시 - 제2008-872호 “책임감리현장참여자업무지침서” - 제2008-82호 “검측감리업무수행지침서” - 제2008-83호 “시공감리업무수행지침서” 의 기준에 따름	-「정보통신공사업법」 에 따른 감리 업무를 수행 - 세부 사항에 대해서는 방송통신위원회 고시 제2009-5호 “정보통신공사업법 시행에 관한 방송통신위원회규정” 및 한국엔지니어링진흥협회에서 발간한 “정보통신공사 감리업무수행지침서” 참조	행정안전부고시 제2008-18호 “정보시스템구축 감리기준” 참조
감리전문회사 선정	「건설기술관리법」 제28조에 따라 등록되어 있고 동법 시행령 제53조에 해당하는 감리전문회사	- 「엔지니어링기술진흥법」제4조의 규정에 따라 엔지니어링활동주체로 신고한 자 -「기술사법」 제6조의 규정에 따라 기술사사무소의 개설자로 등록한 자	「정보시스템의 효율적 도입 및 운영 등에 관한 법률」제12조 및 동법 시행령 제13조에 따라 등록된 감리법인
감리원 배치기준	- 「건설기술관리법」시행령 제52조 - 국토해양부 고시 제2001-363호 “건설공사 감리원 배치기준”에 따름	「정보통신공사업법」시행령 제11조에 따름	- 「정보시스템의 효율적 도입 및 운영 등에 관한 법률」 시행령 제12조제3항 및 제4항 - 행정안전부고시 제2008-18호 “정보시스템구축 감리기준”에 따름

【별표 5】 유비쿼터스도시 건설사업관리 주요사항 예시

유비쿼터스도시 건설사업관리 주요사항 예시

단계	주요사항
공통 업무	사업관리 수행계획서 작성·운영
	사업관리 절차서 작성·운영
	작업분류체계·사업번호체계 관리
	사업정보 축적·관리 및 운영
	사업단계별 총사업비 및 생애주기비용 관리
	사업 참여 간 업무협의 주관
	사업관리 업무관련 각종보고
	각종 인허가 및 대민업무
	클레임 분석 및 분쟁대응 업무
	기타 사업관리 관련 업무
사업계획 단계	사업계획 수립 지원
	사업타당성조사의 적정성 검토
	발주방식 결정 지원
	기본설계 경제성 등 검토
	사업비 분석 및 개략사업비 적정성 검토
	기본설계 조정 및 연계성 검토
	기본설계의 품질관리
실시계획 단계	실시계획 수립 지원
	설계자 선정
	공사 발주계획 수립
	사업비분석 및 공사원가의 적정성 검토
	설계용역 진행상황 및 기성관리
	실시설계 조정 및 연계성 검토
	실시설계의 품질관리
	지급자재 조달 및 관리계획 수립
	설계감리 업무 지원
건설 단계	시공자 선정
	공정·공사비 통합관리
	설계도서, 시공상세도 및 시공계획 검토
	시공확인
	품질관리 및 기술지도
	재해예장 안전·환경관리
	공정관리 및 부진공정 만회대책 수립
	부문별 공사업무 연계 조정
	책임감리 업무 지원
	기성 및 준공검사
	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인
	시설물 인수·인계 계획 검토 및 관련업무 지원
	시설물의 운영 및 유지보수·유지관리업체 선정
	최종 사업관리 보고

【별표 6】 유비쿼터스도시서비스 분류체계 및 예시

유비쿼터스도시서비스 분류체계 및 예시

분야	통합서비스명	단위서비스명	서비스 정의
행정	현장행정지원	불법쓰레기투기감시서비스	불법쓰레기 투기가 빈번한 지역에 지능형 CCTV를 설치하고, 쓰레기 투기 상황 발생 시 경보 알람을 통해 불법 쓰레기 투기 방지 및 단속하는 서비스
		현장행정지원서비스	공무원이 현장에서 인허가처리, 지도점검, 행정처분 등의 행정을 처리할 수 있도록 하는 서비스
		U-자산관리 서비스	공공기관에서 관리하는 재물조사대상(정수물품)물품에 RFID태그를 부착하고, 이를 GPS, CAD와 연계하여 자산의 관리업무를 지능화 및 효율화 하는 서비스
	도시경관관리	U-플래카드 서비스	지역 내 LED미디어보드를설치하여, 현재의 현수막을 대체한 동영상광고서비스를 제공
		현장점용시설물관리서비스	현수막, 옥외광고물, 불법점용시설물 등에 대한 RFID Tag를 부착하고, 모바일기기를 통해 담당공무원이 현장에서 단속하도록 하고, 관련한 관리업무를 지원하는 서비스
		가로수관리 서비스	가로수에 대한 RFID Tag를 부착하고, 가로수 상태를 모니터링하고, 관련한 관리 업무를 지원하는 서비스
		야간조명관리서비스	지역 내 야간조명에 대한 현장 감시 및 관련한 관리업무를 지원하는 서비스
	원격민원행정	U-민원서비스	민원인이 원격지에서 각종 민원에 대한 신청, 열람, 발급 및 처리결과를 인터넷, 세대기, TV, DMB, 모바일(휴대폰/PDA), 키오스크 등을 통해 제공 받는 서비스 민원신청, 열람, 발급 민원신청에 대한 처리상황 및 결과를 통보
		원격세금고지/납부서비스	원격지에서 시민들에 대한 세금, 과태료, 벌금 등을 다양한 기기를 통해 제공하고, 온라인상으로 납부하는 서비스 세금고지 및 조회 세금납부 인터넷, 세대기, TV, DMB, 모바일(휴대폰/PDA) , 키오스크
	생활편의	U-이사 서비스	이사전입신고 시 관련행정정보 변경, 이사 후 지역근방의 시설, 이사센터, 재활용센터, 가스/소방 등 관련한 서비스를 OneStop으로 제공 관련기관주소일괄변경신청 가스/소방/수도/전화 등 관련서비스 출동신청
		토지정보조회서비스	시민의 위치정보에 기반하여 인근 공시지가 조회 및 필지정보조회를 모바일기기를 통해 할 수 있도록 하는 서비스 공시지가조회서비스: GPS 및 전자지번도를 활용하여 현재위치의 주택과 토지가격을 모바일단말기로 실시간제공 필지정보조회서비스: 증축이나 재건축시 해당필지의 토지용도, 허용 가능한 개발밀도 등의 도시계획법령과 건축행위제한 등의 정보를 제공하는 서비스
		지역생활정보포탈서비스	지역 내 행정정보와 위치정보에 기반을 둔 지역생활정보를 지역민에게 맞춤형으로 제공하는 서비스 우리 동네 생활지도 및 옐로우페이퍼, 행정 지역 내 소상공인광고 등 인터넷 및 모바일접속이 가능한 사이트에서 권한에 따라 도시행정, 취업정보, 교통정보 등을 차등제공 시각장애인을 위한 모바일보이스 서비스도 병행
	시민참여	시민신고서비스	시민들이 현장에서 즉시 불법 행위에 대한 신고 및 현장 감시 활동에 참여할 수 있도록 서비스를 제공하는 서비스
		전자투표 서비스	중앙정부 및 지자체 등의 공공기관에서 지역민에 대한 여론조사 및 본인 확인여부가 필요 없는 투표를 진행하는 서비스
		U-공청회 서비스	각종 도시개발 사업 및 계획안에 대한 주민공청회를 시공의 제약 없이 원격으로 경청하고 자유롭게 의견 게진 등을 할 수 있도록 참여가 가능한 서비스
교통	교통관리 최적화	실시간교통 제어서비스	교통량, 운행속도 등 실시간 교통정보를 수집, 관리, 제공하고 교통시설을 자동제어 함으로써 교통흐름을 최적화하는 서비스
		고속도로교통류제어서비스	고속도로의 교통정보를 가공하여 운전자에게 정보제공하고, 효과적인 교통류제어를 위해 관련 시스템간 연계
		광역교통류 제어서비스	광역지역에서 교통류를 제어하고 교통소통을 적정수준으로 유지하기 위해 주요 지점의 유출입 제어
		교통제어정보 제공서비스	도로상에 설치된 검지기를 통하여 교통정보를 수집하고 실시간으로 우회도로, 돌발 상황, 진행방향 도로의 교통정보를 운전자에게 제공
		돌발상황감지 서비스	교통사고, 차량고장, 공사 등 비정상적 교통상황에 관한 정보를 실시간으로 수집, 관리하고 체계적으로 대응, 처리하는 서비스
		돌발상황대응 조치서비스	도로상에서 발생하는 돌발상황을 센터에서 자동 검지하거나 제보자 신고, 119구조대 및 한국응급구조단 등의 제공 정보를 이용하여 검지 및 확인하여 대응, 처리
		긴급차량운행 관리지원서비스	도로상에서 발생하는 돌발상황에 대비하여 긴급차량을 대기시키고, 돌발상황 발생 시 신속하고 적절하게 긴급차량을 지원
		속도위반차량단속서비스	과속, 버스전용차로 위반, 신호위반 과적 등 교통법규위반행위를 실시간으로 파악하고 자동으로 행정 처리하는 서비스
		전용차로위반 차량단속서비스	전용차로를 위반 차량을 자동으로 검지하고, 번호판을 인식하여 운전자와 관련기관에 해당정보 제공
		차선위반차량단속서비스	차선을 위반 차량을 자동으로 검지하고, 번호판을 인식하여 운전자와 관련기관에 해당정보 제공
		신호위반차량단속서비스	신호를 위반 차량을 자동으로 검지하고, 번호판을 인식하여 운전자와 관련기관에 해당정보 제공
		주정차위반 차량단속서비스	주정차 위반 차량을 자동으로 검지하고, 번호판을 인식하여 운전자와 관련기관에 해당정보 제공
		과적차량 단속서비스	화물차량을 정지시키지 않고 주행 중에 자동으로 계측하여 과적 단속하고 운전자와 관련기관에 해당정보 제공
		교통공해관리지원서비스	대기오염 소음 등 교통공해정보를 실시간으로 수집, 관리, 제공함으로써 교통으로 인한 환경오염을 자동으로 관리하는 서비스
		차량추적관리서비스	영상인식 및 교차로 검지기를 설치하여도 난차랑, 뺑소니차량 등에 대한 실시간검색 및 추적서비스 도로상의 지능형 CCTV를 이용하여 경찰의 추적대상범행/도난차량의 번호를 자동인식하고 위치 및 도주경로 정보를 경찰에게 실시간으로 제공함
		승용차자유 요일제무인단속서비스	승용차 자유요일제 스티커에 RFID를 장착하고 주요도로, 터널, 주차장 등에 무선주파수 인식 시스템을 장착하여 승용차 자유 요일제 참여 차량을 관리함
	전자지불처리	유료도로통행료전자지불서비스	유료도로통행료, 혼잡통행료 등 통행요금을 주행상태에서 자동으로 지불하는 서비스
		혼잡통행료 전자지불서비스	도심지를 진입하는 차량에 대해 혼잡통행료를 DSRC 단말기 또는 OBU를 통해 주행상태에서 자동으로 통행료 징수
		대중교통요금 전자지불서비스	시내버스, 지하철, 택시 등 대중교통요금과 주차요금 등 교통편의시설 이용요금을 자동으로 지불하는 서비스
		주차요금전자지불서비스 (공영주차장)	주차장 출입구에 설치된 단말기를 이용하여 차량인식 및 차단기 자동 개폐, 차량 종류, 일반차량 및 정기주차 차량 자동 인식으로 요금 징수
	교통정보유통활성화	기본교통정보제공서비스	ITS시스템이 일반적으로 수집하는 교통정보를 일반 교통이용자 에게 제공하는 서비스
		교통정보관리 연계서비스	ITS시스템이 수집, 관리하는 기본교통정보를 종합하여 타 시스템 및 부가사업자들에게 제공하는 서비스
	차량여행자 부가정보제공	차량여행자 교통정보제공서비스	차량 및 차량이용자에게 교통상황, 최적경로, 주차 등 여행에 필요한 교통정보를 출발전 또는 주행 중에 제공하는 서비스
		차량주행안내서비스	차량에 동적교통정보를 제공하며, 기후조건, 도로 폐쇄 또는 교통사고 상황 등의 발생 시 차량의 경로를 재조정하여 안내
		주차정보 제공서비스 (공영주차장)	공영주차장에 자동화 설비, 여러 지역에 분산된 주차장에 대한 통합관제 등을 통해 주차관리업무를 효율화하고, 사용자들의 편의성을 도모함
		보행자경로 제공서비스	보행자, 자전거이용자 등 차량을 이용하지 않는 여행자에게 여행경로, 교통이용 안내 등 교통정보를 제공하는 서비스
	대중교통	대중교통정보제공서비스	시내외버스, 고속버스 등 대중교통의 위치, 환승정보 등 대중교통관련 운행정보를 제공하는 서비스
		대중교통관리서비스	시내외버스, 고속버스 등 대중교통의 운행위치, 운행간격, 사고상황 등 대중교통운행정보를 수집, 관리하여 배차간격 조정, 운전자 관리, 예약 등 대중교통운행을 최적화하는 서비스
	차량도로첨단화	차량사고발생 자동경보서비스	근접차량 운행상태, 철도건널목의 열차운행상황, 사고상황 등 교통안전과 관련한 실시간 교통정보를 수집, 관리, 제공하여 차량운전자 및 보행자의 안전을 지원하는 서비스
		차량전후방 충돌예방서비스	차량의 전후방에 타 차량이나 장애물을 감지하고, 충돌위험이 있을 경우 차량을 자동으로 제어
		차량측방충돌예방서비스	차량의 측방에 타 차량이나 장애물을 감지하고 충돌위험이 있을 경우 차량을 자동으로 제어
		교차로충돌 예방서비스	교차로에서 감속 또는 정지가 필요한 시점 및 지점에서 신호등의 현시상태나 차내의 수신/경고 장치로 송신
		철도건널목 안전관리서비스	철도건널목에서 감속 또는 정지가 필요한 시점 및 지점에 노변경고판, 차내 수신/경고장치로 운전자에게 경고하고 차량 제어가 필요할 경우 차량제어
		감속도로구간안전관리서비스	도로상의 과속위험구간, 노면결빙구간, 안개구간, 터널 및 교량 등 감속이 필요한 지점 및 시점에서 운전자에게 감속요인 정보 및 대처방안 제공
		차량안전자동 진단서비스	자동차의 주요 부품에 부착된 RFID로 결함을 발견하고 위험을 경고하거나 필요한 조치 제공
		보행자안전 지원서비스	교차로나, 보도에 보행자의 안전을 위해 음성서비스 등을 제공하여 보행자 안전을 제고하는 서비스
		운전자시계 향상서비스	주행 중 운전자의 시야를 방해하는 요소들을 제거하기 위해 발수유리나 적외선 windshield, tilting 헤드라이트 등의 기술로 안전운전 도모
		위험운전방지서비스	운전자의 운전행태를 모니터링 하여 이상 발견 시 운전자에게 경고하여 사고예방
		차량간격제어서비스	주행 중 차량 간 거리가 일정하게 유지될 수 있도록 개별차량을 자동으로 제어하여 도로의 용량을 증대시키고 ,전후방 충돌 방지
		자동조향운전서비스	도로에 설치된 차량유도장치, 노변통신장치를 통해 자동주행 기능을 갖춘 차량으로 무인운전
		차량군집운행서비스	차량 간의 간격을 일정하게 유지하면서 차량군의 흐름을 일정하게 유지하면서 자동 운행하는 서비스
	택시콜	택시콜서비스	고객의 입장에서 현재 위치에서 가장 가까운 택시의 위치정보를 알고 자신의 스케줄에 맞게 실시간으로 호출 및 예약을 할 수 있고, 택시 안에서도 교통, 결제, 관광정보, 이메일 뉴스 등 정보를 실시간으로 제공받고 교환
보건·의료·복지	건강관리 서비스	홈건강관리 서비스	가정용 헬스케어단말기를 통해 거주민의 건강진단, 운동/식이처방, 스트레스관리 등의 건강관리서비스를 제공하고 건강관리정보를 지속적으로 관리 및 상담하며 이상발생시 병원예약 등 의료서비스를 연계해주는 서비스 보건소에서 제공하는 만성질환&독거노인원격관리서비스도포함 -독거노인 질병조기 예방및건강관리 건강측정 모니터링(혈압,혈당,체지방,스트레스,활동량등), 실시간측정결과 피드백, 전문가의 측정결과 모니터링(헬스케어매니저, 의사), 이상소견 시 전문가와 원격 화상 상담 및 병원진료예약, 개인맞춤형 건강증진 프로그램(운동/식이), 응급건강관리, 건강정보 서비스 제공주체는 헬스 케어 전문업체, 병원, 보건소 등 가능
		커뮤니티건강관리서비스	커뮤니티시설에 설치된 헬스케어장비를 통해 건강진단, 운동/식이처방, 스트레스관리 등의 헬스케어서비스를 제공하고 건강관리정보를 지속적으로 관리하는 서비스 홈건강관리서비스와 연동서비스 제공 건강관리사 등 전문인력을 통한 운영이 가능할 경우 건강측정장비를 가정용이 아닌 전문용을 채택할 수 있어 홈헬스케어보다 전문화된 서비스 제공 가능 대상: 주민자치센터, 건강증진센터, 아파트단지공용건강관리실, 직장건강관리실, 보건소, 학교 등
		투약관리 서비스	센서가 부착된 약품보관함이 투약시간 및 처방전에 따른 투약방법을 알려주고 투약이행여부를 보호자에게 실시간 통보하는 서비스 투약시간 알람을 휴대폰, 홈네트워크시스템 등과 연동 가능
		U-휘트니스 서비스	체력진단시스템을 통해 측정된 체력측정치를 기반으로 개인맞춤형 운동처방프로그램을 제공하고 휘트니스센터내 각 운동기기에 자동으로 반영되어 개인맞춤형 운동수행을 지원하는 서비스 개인맞춤형 운동수행지원 항목: 운동강도, 횟수, 소요시간관리, 활동량 등 체력진단시스템이나 운동기기에 설치된 터미널을 통해 이용방법을 멀티미디어로 제공 운동내역 분석결과를 건강관리시스템에서 관리
	U-병원서비스	병원정보화 서비스	처방전달시스템, 전자의무기록시스템, 영상정보 획득 및 전달시스템, 의료ERP/DW 등의 의료정보화시스템과 모바일기반PointOfCare시스템을 기반으로 원내/외에서 의사, 간호사 및 직원들이 의료용 PC 나 PDA, 타블릿 PC 등의 모바일장비를 이용하여 원격실 시간의료 및 관리업무수행이 가능하도록 지원하는 서비스 처방전달시스템(OCS), 전자의무기록시스템(EMR), 영상정보획득 및 전달시스템(PACS), 의료ERP,DW 등의 의료정보화시스템, 모바일기반PointOfCare(POC)시스템, 진료나수술시의료정보를 제공하고 진단과 처방의 오류를 사전에 체크하며 진료정보공유를 통해 협력의료 등이 가능하도록 지원하는 진료 및 의료지원시스템(CDSS,ClinicDecisionSupportSystem) 등
		스마트 병원 진료카드서비스	IC Chip 기반의 다기능 스마트카드와 각종 연동용 단말기를 기반으로 환자에게 ID, 전자지불, 환자정보, 교통카드, 인증서 등의 원카드 서비스와 대기환자 관리서비스를 제공하고 병원에게는 통합관리 서비스를 제공하는 서비스 병원카드를 단말기에 인식하여 등원확인 및 접수 시 대기환자를 위하여 접수현황을 미디어보드에서 안내하고, 진료순서가 되면 호출 및 병원정보안내Kiosk 등에서 진료실 위치안내 등의 서비스를 제공함
		스마트병상 서비스	개인 병상용 멀티미디어장비를 통해 엔터테인먼트, email, 인터넷 등 편의 서비스 제공 및 병원시스템 연계를 통해 진료정보를 제공하고 병원의 이미지를 제공하는 서비스
		병원 자산 및 환자관리서비스	의료행위상의 안전성을 확보하고 의료기관 자산관리의 효율성을 높이기 의약품, 장비, 수혈용 혈액, 수술용환자/신생아, 음식, 의료폐기물 등 체계적 관리가 필요한 대상에 대하여 RFID를 부착하여 관리하는 서비스
		전자처방전서비스	의료기관과 약국 등을 연동하는 통합 약처방 인프라를 기반으로 주치의가 발행하는 처방전을 약국에 자동전송하고 조제 후 배송망을 이용하여 댁내에 배달서비스 제공하는 서비스 약의 배송은 의료법 허용 시 가능함
		병원환경관리서비스	병원 관리자의 전반적인 병원환경관리 시 센서기술, 지능형 환경관리장치, RFID 태그 등으로 병실/진찰실/수술실의 최적 환경유지을 유지하고 병원내 2차 감염을 방지할 수 있는 환경을 유지 하는 서비스
	원격의료 서비스	원격진료 서비스	거동이 불편한 환자가 직접 의료기관을 방문하지 않더라도 가정이나 커뮤니티건강증진센터의 원격진료 장비를 통해 원격으로 담당의사의 진료나 건강 상담을 받아 처방전을 발급받는 서비스 진단 후 지속적인 케어가 필요한 만성질환자 중심의 서비스 국내의 경우 의사와 환자 사이의 원격진료가 의료법상 허용되지 않고 있으며, 현재 국내에서 시행중인 모델은 병원-보건소-보건지소/진료소간 의료네트워크상에서 병원의 의사가 원격지의 보건지소/진료소의 원격영상진료실의 간호사를 통해 환자를 진료하고 처방하는 모델임
		원격협진 서비스	원격지 의료기관간 의료진이 원격협진시스템을 통해 환자의 진료 정보를 공유하고 공동 진료, 처치, 수술, 처방 등 원격협진을 제공함으로써 환자가 원거리 의료기관을 방문하지 않고도 품질 높은 의료서비스를 받을 수 있는 서비스 대형병원과 의료취약지역의 협력병원간 원격협진시스템을 통해 환자의 진료정보를 공유함으로써 환자는 원거리의 대형병원을 직접 방문하지 않고 근처 협력병원에서 진료 받는 것만으로도 원격지대형병원의 실시간진료 서비스와 처방을 받을 수 있음 원격영상진료시스템(원격화상시스템,생체정보측정시스템등), PACS, 의료정보표준화 등 첨단의료정보화시스템을 기반으로 구현됨
		방문의료 서비스	보건소나 병원의 방문 간호의료진이 환자가정을 방문하여 모바일진료시스템을 기반으로 진료, 건강상담, 투약지도, 간호서비스, 보건교육 등 방문의료서비스 제공하는 서비스 대상:노인, 장애인(거동불편자), 만성질환자, 정신질환자, 우울증환자, 알코올중독자, 산모와 영유아 등
		응급의료 서비스	구급차에 화상통신 장비와 환자상태를 측정할 수 있는 원격의료장비를 설치하여 응급환자 수송 시 응급의료정보센터로 화상데이터와 Vital Sign 등을 전송하면 전문의가 데이터를 확인하여 응급처치를 지원하는 서비스
	U-보건관리 서비스	개인건강정보관리서비스	의료기관간 의료정보공유가 가능한 의료정보표준화와 개인의 혈액형, 알레르기, 수술이력 등 응급의료제공 시 필요한 개인병력이 DB관리를 기반으로 응급상황 시 신속한 처치를 지원하는 서비스 거주민의 혈액형, 검사수치, 알레르기, 부작용 등의 정보데이터 베이스구축 개인의 응급의료정보가 저장된 유비쿼터스칩을 착용하여 응급상황 시 활용 119응급처치 및 지역의료기관에 정보 제공
		특수의약품 관리서비스	환각, 각성 및 습관성, 중독성이 있는 특수의약품을 RFID 태그 및 리더기를 이용하여 체계적으로 관리하고 유통하는 서비스
		식품관리 서비스	유전자조작 및 유해식품, 광우병 및 조류독감 등의 위험이 있는 식품에 RFID 및 리더기를 이용하여 체계적으로 관리하고 유통하는 서비스
		수혈/혈액관리서비스	RFID 기반으로 수혈 및 혈액의 체계적 관리를 제공하고 혈액팩에 부착된 각종 센서로 혈액 관리에 필수적인 환경 요인 변화를 관리하여 혈액의 폐기를 미연에 방지하는 서비스
	U-보건소서비스	보건소종합정보서비스	유무선 인터넷과 모바일통신기반의 유무선포탈과 보건소내 디지털미디어보드, 키오스크, u-tag기반의 시설물안내시스템 등을 통해 각종 보건/건강정보나 보건소안내정보 및 서비스를 제공하는 서비스 보건소시설이용안내, 보건정보(전염병, 방역, 예방접종정보), 건강정보 등 제공을 위한 유무선 포탈 서비스 보건소서비스이용예약 원격상담 보건소가 중심이 되어 가족의 구성시기부터 세대원의 연령 및 상태에 적합한 보건서비스 제공
		보건시설관리서비스	보건소에서 관리하는 주요 보건시설물의 지도점검내용을 모바일단말기 또는 RFID휴대형리더를 통해 실시간으로 조회 및 관리하는 서비스 신속 정확한 시설물관리 이력의 자동생성 및 관리
	가족안심서비스	치매노인/미아방지서비스	치매노인, 어린이, 장애인 등이 착용한 RFID나 전용단말기를 인식하여 위치를 실시간 모니터링하여 지정된 지역을 이탈시 보호자에게 통보하고 위치추적을 통해 구조하여 실종을 방지하는 서비스 LBS와 CCTV기반의 위치추적 RFID팔찌나 목걸이 등의 전용단말기에 노약자의 주소, 보호자연락처, 사진, 지문 등 신원확인에 필요한 정보를 입력하여 시민/공공기관에서 보호가 필요한 노약자 발견 시 긴급상황에 신속대처 어린이, 장애인, 치매노인을 대상으로 서비스 제공
		노약자안전 생활모니터링서비스	노약자가 착용한 활동센서와 생활공간의 동작감지센서, 응급호출장비를 통해 노약자의 낙상, 무동작을 비롯한 각종 응급상황발생시 응급상황정보가원격지에서 실시간모니터링되어 신속한 구급구조서비스를 제공하는 서비스 이상상황 발생 시 보호자, 구급구조기관, 가장 근접한 자원봉사자 등에 자동 통보
		노약자이동 지원서비스	노약자의 이동성을 지원하는 전동휠체어/스쿠터에 부착된 단말을 통해 주행경로안내, 응급호출 등의 지원서비스를 제공하고 대중교통과 연계된 대여소, 보관소 운영을 통해 편리한 대여와 반납, 보관을 지원하는 서비스 시설 및 인접지역 곳곳에 설치된 대여소중 인접한 곳에서 대여하고 도착지에 인접한 대여소에서 반납이 가능하도록 함
		U-실버도우미서비스	정보통신서비스와 디지털기기 사용에 어려움을 겪는 독거노인 세대를 대상으로 생활지원 매니저가 원격에서 화상 상담과 원격제어를 통해 지원함으로써 독거노인 세대의 생활편리를 증진시키고 자립을 지원하는 서비스
	장애인지원서비스	장애인보행 지원서비스	시각장애인을 위한 유도용 보도블록(점자보도블록)에 RFID을 넣어서 시각장애인의 지팡이나 전용단말기에서 인식하게 함으로써 지팡이를 짚고 유비쿼터스칩이 내장된 점자블록을 따라 걸어가 면 보행에 필요한 정보를 알려주는 서비스 공원 등의 주요시설에 RFID인프라를 구축하여 장애인들이 안전하게 산책하고 편리하게 찾아갈 수 있는 환경 제공 장애인 경로안내 또는 교차로상의 도로횡단, 신호등 알람 등 장애인교통시설 이용 시 안전서비스를 제공 장애인의 횡단이 종료될 때까지 횡단보도 신호등의 신호를 자동으로 연기되도록 함
		장애인시설안내서비스	장애인에게 전용단말기나 u-Tag를 지급하여 장애인시설 이용에 관한 다양한 정보를 장애인의 장애유형별로 습득가능한 형태로 제공하는 서비스 시설에 설치되어 있는 RFID리더에서 카드를 소지한 장애인이 접근 시 이용가능토록 조치
	다문화가정지원	다문화가정도우미서비스	국제결혼으로 늘어나는 결혼이주인구와 다문화가정을 위하여, 한국생활정착에 필요한 상담, 의료, 복지의 통합서비스를 전용홈/모바일기기를 통해 제공하는 서비스 문화콘텐츠 제공 및 국가별 커뮤니티 운영 등을 지원
	출산 및 보육지원	출산 및 보육지원서비스	임신부터 출산 및 보육 전과정에 걸쳐 효과적인 모자 보건서비스, 사회 인프라 이용에 따른 편의지원 서비스, 보육지원 서비스 등을 유비쿼터스 기술을 기반으로 제공하는 서비스
환경	오염관리서비스	수자원오염관리 서비스	수자원 전체에 대한 종합적인 수질모니터링 및 관리를 통한 최적의 수질 유지 및 활용하는 서비스 하천, 저수, 지하수 등 상수원에 대한 실시간 수질 모니터링 오염 수준 확인 및 원인 제거를 통해 최적의 수질 유지관리 서비스 제공 하수 및 폐수 배출원에 대한 모니터링, 처리 및 관리 서비스
		토양오염관리서비스	토양오염 취약지구에 대한 오염수준 모니터링 및 관리서비스 주요 오염예상지역에 대한 오염 센싱 및 모니터링 체계 구축
		대기오염관리 서비스	대기 중 각종 오염물질, 악취물질 및 오존에 대한 모니터링, 관리를 통한 대기오염 감축 종합서비스 오염지수에 따른 대민 경보 및 신속한 대처방안 수립/집행을 위한 기반서비스 공용시설에서 유해가스 측정센서를 부착하여 유사시 운영센터로 자동전송으로 사고예방
		종합 환경오염 정보서비스	분야별 오염관리를 통하여 수집된 정보를 종합적으로 관리하며 온실가스 저감과 관련된 대주민홍보, 교육 및 탄소거래지원, 오염배출 부과금 관련 정보서비스 각 분야 오염상황에 대한 종합 정보제공 대응서비스 온실가스 저감과 관련된 지역탄소배출 저감 정보관리 및 주민 홍보 활동 및 교육 서비스 지역주민의 탄소배출 저감에 대한 탄소 사이버머니 운영 오염배출업자, 지하수개발자, 환경 분담금 부과대상에 대한 배출부과금 관련 정보 서비스
	폐기물관리서비스	생활쓰레기관리서비스	RFID/USN을 이용하여 쓰레기 자동분리/수거 및 실시간 모니터링 서비스 지역 또는 특정구역별 쓰레기 배출량 자동산정을 통한 차별화된 과금 부여 쓰레기수거박스에 RFID태그를 부착하여 쓰레기 관련 정보를 인식하여 쓰레기를 자동분리하고 청소차량 운행일정 및 코스를 결정하여 쓰레기를 수거
		음식물쓰레기관리서비스	음식물 쓰레기에 대한 분리수거 및 이를 활용한 사료화, 에너지화를 통한 재활용 서비스 음식물 쓰레기수거박스에 RFID태그를 부착하여 쓰레기처리 관련 정보를 취합관리 쓰레기 발생양에 따른 수거일정, 코스결정을 통한 최적 수거서비스
		유해성폐기물관리서비스	유해성폐기물에 RFID를 적용하여 처리과정을 실시간 모니터링 및 경로추적 관리 RFID를 기반으로 유해성 폐기물에 대한 정확한 정보확인으로 위해 사고방지
		재활용품관리서비스	재활용품 배출, 수거 및 재활용에 대한 종합관리 및 재활용품 검색 및 활용을 위한 마켓플레이스 서비스 RFID를 이용한 재활용품 관리 및 Web2.0적용 마켓플레이스 운영을 통한 재활용율 향상
	친환경서비스	생태공간관리서비스	산림, 해변, 습지, 녹지 등의 자연생태공간 및 생태계에 대한 종합 모니터링 및 관리서비스 산불, 산사태 등의 재해모니터링 및 방지, 관리 서비스 주요 자연생태개체에 대한 RFID를 부착하여 개체수, 종류, 생육상태, 위치, 이력관리 지능화된 수변공간의 자연생태와 생태공원의 생태환경을 실시간으로 수집 및 관리하고 관련 정보를 시민에게 제공 생태전자지도서비스 및 생태 관련 정보 및 교육자료 제공
		공원녹지관리서비스	공원녹지에 대한 환경종합모니터링 및 관리서비스 지능화된 수변공간의 자연생태와 생태공원의 생태환경을 실시간으로 수집 및 관리하고 관련 정보를 시민에게 제공 공원녹지 지도서비스 및 공원관련 정보 및 교육자료 제공
		수목관리 서비스	가로수 및 지역 보호수에 대한 모니터링 및 이력, 유지 관리 서비스
		지능형자전거이용서비스	자전거대여서비스 및 관련Infra(자전거도로, 표지판, 샤워 및 탈의시설, 보관시설)구축 및 관리서비스 전용단말기와 RFID 및 센서리더기활용을 통한 대여 및 전용주차장 및 보관소운용으로 시민들의 자발적인 이용을 유도하는 한편, 자전거에 부착된 전용단말기를 통한 실시간교통/생활/관광정보를 제공
	에너지 효율화 서비스	에너지원격 검침서비스	전기, 가스, 온수 등의 사용량을 원격에서 실시간의 검침하여 통합과금하는 서비스 지역, 건물, 세대 단위의 에너지 사용 원격 검침, 통합과금 및 관리 서비스 원격검침, 통합 모니터링, Peak 관리, 요금 관리 서비스
		실시간전기 사용관리서비스	SmartMetering설치를 통하여 실시간으로 전기사용을 모니터링하고 전기료절감 및 최적사용을 위한 지원서비스 스마트미터링, 고효율설비구축을 통한 절감서비스 에너지사용분석, 절감컨설팅 및 관리서비스 HomeNetwork과 연계한 에너지세이빙이 가능한 편리서비스
		복합가로등 서비스	LED조명을 통한 에너지절감, 무선인터넷, 방송, CCTV등의 기능을 구현한 복합 가로등설치 및 중앙관제서비스 LED 등 고효율가로등 및 자동제어, 통합관제서비스 태양광, 풍력 등의 신재생에너지 활용가로등 서비스
	신·재생 에너지 서비스	태양광발전 서비스	공공 및 사유지의 유휴지에 태양광 발전 설비를 구축하여 전기 생산 및 공급 운영 서비스 공공주차장, 공원 등의 지역을 활용 소규모태양광발전설비 구축 및 운영 서비스 USN기술을 통한 통합운영관리 서비스
		태양열난방서비스	주택 및 소규모건물을 대상으로 태양열난방설비를 설치,운영을 통한화석에너지 사용을 절감하는 서비스 주택 및 건물에 태양열설비설치지원 및 운영관리서비스 USN기술을 통한 통합운영관리 서비스
		지열/하수열냉.난방서비스	지열, 하수열등 미활용에너지를 회수하여 냉․난방을 공급하여 화석에너지사용을 절감하는 서비스 지열 및 하수열을 회수하여 지역냉․난방공급서비스 USN기술을 통한 통합운영관리 서비스
		풍력발전서비스	공공 및 사유지의 유휴지에 풍력발전설비를 구축하여 전기 생산 및 공급 운영 서비스 공공지역에 소규모 풍력발전설비구축 및 운영서비스
방범·방재	구조구급	위급알림서비스	시민이 위급상황 시 가까이 있는 지능형가로등 또는 휴대형단말을 통해 위급상황을 즉각 운영센터로 알리고 센터에서는 시민의 위치와 상황을 CCTV를 통해 바로 파악하여 해당지역에 경고상황을 발생시키거나 출동하는 서비스 가로등 또는 CCTV설치공간, 지능형Pole에 도움벨이나 상황감지센서를 부착 위급 시 자신의 위치 및 상황을 119나 관할경찰서, 지정기관에 자동 통보 보안요원과의 화상통화 및 출동, 경고음발생 및 주변조명점 등
		응급구조서비스	조난상황 등 구조가 필요한 상황에 시민이 휴대형단말로 상황을 통보하면 해당기관에서 시민의 위치를 실시간으로 파악하여 응급구조하는 서비스 119나 응급구난출동기관에 사고나 발병 등을 자동으로 통보하여 언제 어디에서나 응급구난 제공 LBS를 이용하여 얻은 위치측위정보를 바탕으로 헬기나 선박 등에서 조난자의 위치를 실시간파악과 신속한 구조
	개인안심	대중교통이용안심정보서비스	택시, 버스 등에 RFIDtag를 부착하고 승객이 탑승할 때 이를 휴대형단말로 읽어 지정한 보호자/기관 등에게 탑승정보를 전송함으로써 대중교통을 보다 안심하고 이용할 수 있는 서비스 택시, 버스 등의 외부 또는 내부에 RFIDtag를 의무적으로 부착하고 승객탑승 시 RFID리더기능이 있는 핸드폰 등으로 이를 읽어 지정한 보호자, 운영센터, 기타기관 등에게 탑승차량정보, 시간, 위치 등을 전송 차량에 의한 납치 등의 범죄예방, 어린이 이동정보제공 등으로 활용 지하철이용방법과 유사하게 승차 및 하차 시 태그하고 결제하는 것을 의무화하여 결제정보와 탑승차량, 탑승자정보가 모두 전송되도록 할 경우 단순한 안심이용을 위해 RFIDtag를 부착하는 것 보다 이용률을 높일 수 있음
		가정방범방재서비스	각 가정/소규모 빌딩에 각종 경비용 Device, 화재/누전센서 등을 설치하여 이상상황 발생 시 담당기관에서 원격으로 확인 및 출동하고 가족구성원도 이를 웹/휴대폰 등으로 실시간 확인할 수 있는 서비스 각 가정/소규모빌딩에 각종경비Device를 설치하여 이상발생시 관제센터에서 근접순찰팀을 파견하여 대응하며 부재시에는 건물을 순회관리하여 재산을 보호함 가스누출, 화재발생, 누전 등의 사고발생시 소방서 등 담당기관에서 원격으로 이를 인식하고 신속하게 대처함 가족구성원은 외부에서 웹, 휴대폰 등으로 댁내상황을 실시간으로 확인
	공공안전	공공지역안전감시서비스	공공지역의 안전유지를 위해 이상상황을 지능적으로 감지할 수 있는 지능형 CCTV 및 각종 안전관련 센서를 설치하여 이상상황 발생 시 해당지역에 경고방송 등을 하고 신속하게 출동하는 서비스 공공지역의 관리 및 범죄예방을 위해 지능형 CCTV 및 센서를 활용한 감시체계 구축 범죄 및 사고위험상황에 대한 경고방송 등을 통하여 사고지역내 피해 최소화 유사시 신속한 현장출동 지원체계 구축
		모바일치안정보서비스	경찰이 도보 또는 차량으로 이동하면서 사건발생시 범죄자, 지문 등 데이터베이스에 실시간으로 접속하거나 사건지역 영상을 상호 송수신함으로써 현장의 치안업무 효율성을 높이는 서비스 범죄자정보데이터베이스에 경찰관들이 무선으로 실시간 접속하여 현장에서 범죄자의 체포활동을 지원 순찰차량이 이동중 사건발생시 관제센터로 영상전송 및 지원요청, 타지역사건 영상실시간공유로 순찰업무 효율성향상(미국캘리포니아주리폰시) 휴대용 지문감식기를 통한 신속한 지문대조(호주뉴사우스웨일스주의FieldIdentificationProject)
		스쿨존서비스	통학로 주변, 교내 등에 CCTV, 속도감지기를 설치하여 차량과 속 등 어린이 위협요소를 제거하고 교내 어린이안전을 강화하며 운전자에게는 근처에 있는 어린이의 존재유무를 알려주어 안전운전을 유도하는 서비스 통학로 주변, 교내 등에 CCTV와 속도감지기를 설치하여 차량과속방지 및 불법주∙정차 등 위협요소를 제거 스쿨존, 주거지역 등 어린이사고 다발예상지역에 DFS 및 RFID기술을 이용하여 어린이 존재유무를 운전자에게 경고 교내외 통학로, 사각지대 등에 CCTV를 활용하여 교내어린이 안전 강화
		범죄자위치추적서비스	상습성이나 재범위험이 있는 특정 강력범에 대해 GPS 등을 이용한 전자팔찌/발찌를 일정기간 착용토록 의무화하여 위치/동선을 실시간으로 감시하고, 필요시 범죄자의 위치, 신상정보를 시민에게 제공하는 서비스 상습성이나 재범위험이 있는 특정 강력범에 대해 GPS 등을 이용한 전자팔찌/발찌를 일정기간 착용토록 의무화하여 위치/동선을 실시간으로 감시하고 장비를 파손시키거나 방전시켰을 경우 관제센터로 통지 범죄자 위치, 신상정보 등을 요청하는 시민에게 웹/모바일 등을 통해 공개(현재는 법적으로 불가)
	기관안전	무인경비서비스	보안이 중요한 공공기관, 기업 등에 대해 RFID/USN 및 지능형CCTV기술을 활용하여 무인출입관리, 외곽보안, 순찰관리 등을 지원하는 서비스 동작감지센서 CCTV 등을 활용하여 건물에 출입하는 사람을 대상으로 무인출입자통제 및 층별 출입자현황을 실시간 관리 정전기·적외선센서, 실시간 고성능CCTV를 이용하여 외곽경비체계 구축 RFID와 영상인식(번호판자동인식)기술을 이용하여 차량출입 무인관리
	화재관리	U-화재감지서비스	산불 및 화재 발생빈도가 높은 지역에 화재감지센서 및 CCTV를 설치하여 화재상황을 초기에 감지하고 진행방향을 분석하여 초기진압 및 시민대피를 지원하는 서비스 산불 및 화재발생빈도가 높은 지역에 화재감지센서가 부착된 센서노드와 감시카메라를 설치하여 화재발생 조기감지 화재진행방향을 분석하여 경고방송 등을 통해 시민의 안전을 확보하고 경제적 손실 최소화 소방시스템과 연계하여 실시간 화재사고 예방모니터링 및 초기 진압대응
		소방지원서비스	화재발생시 현장으로의 최적이동경로를 제공하고 발생건물의 도면을 제공하여 건물구조를 사전파악할 수 있도록 하며, 현장에서는 소방관의 위치, 움직임여부를 실시간으로 파악하여 소방관의 안전을 보장하는 서비스 화재발생시 건물의 구조도 및 평면도를 제공하고, 교통상황을 반영하여 현장으로의 최적 이동경로를 제공 컴퓨터나 PDA 등으로 소방관들이 출동과정이나 현장에서 건물에 대한 구조를 사전파악함으로써 인명 및 재산피해를 최소화 현장지휘부에서는 소방관의 정확한 위치와 움직임 여부를 실시간으로 파악하여 소방관의 안전을 최대한 보장함
		모바일소방시설물점검서비스	매년 1~2회 시행되는 소방검사 대상물을 PDA 등 모바일 기기로 검사하고 현장에서 정보입력 및 처리
	자연재해관리	하천범람정보서비스	주요 하천에 대해 수량을 모니터링 할 수 있는 센서/장비들을 설치하여 하천범람우려가 있을 경우 인근지역 및 공영주차장 등 시설이용자에게 경고를 전달하는 서비스 수량을 모니터링 할 수 있는 센서/장비를 설치하여 홍수발생시 인근지역에 경고발령 ,가뭄대비 직접적 피해가 예상되는 인근공영주차장의 경우 주차장 이용자에게 실시간정보 제공
		제설관리서비스	제설차량이 본부에 위치기반으로 제설상태영상을 실시간전송하고 제설본부에서는 GIS기반으로 제설작업이 필요한 도로에 작업명령을 내림으로써 효율적이며 신속한 제설작업을 지원하는 서비스 GPS, GIS기술을 도입하여 사진촬영 기능이 장착된 제설차량이 제설본부에 도로별 제설상태사진을 실시간 전송 즉시적인 대응체계를 확보함으로써 신속한 제설작업과 교통소통확보를 통한 안전사고 예방
		지진정보서비스	USN 등을 통한 지진 관측망 구축을 통해 지진 대응정보를 빠르게 전달하여 시민안전 확보와 경제적 손실 최소화
		태풍정보서비스	시민의 위치에 기반하여 태풍 위험권에 위치할 경우 경고 메시지 및 안전지역 대피 정보 제공
		해일정보서비스	원/근해에 풍랑, 유속 등 해일을 감지할 수 있는 센서를 설치하고 해안 거주 주민 및 어업 종사자에게 해일 발생 정보 실시간 제공
	사고관리	공공시설유해가스정보서비스	공공시설에 유해가스 측정센서를 부착하여 유사시 대피 경고를 발령하고 즉시 대응을 통해 피해 최소화
		지반상태관리서비스	연약지반지역의 정보를 구축하고 해당지반에 센서를 설치하여 붕괴 또는 함몰 등의 재난발생을 상시적으로 모니터링하고 이상상황 시 즉시 대응
		노후건물상태관리서비스	USN 등 센서 기반으로 노후 건물의 붕괴 등 이상상황을 모니터링하고 사고를 사전에 감지하여 인명 및 재산 피해를 최소화함
	통합재해관리	통합재해관리서비스	재해발생시 인근지역에 경보를 발령하고 재해범위를 설정하여 유관기관과 공조하도록 하며, 피해자 발생 시 행정기관/유관기관이 연계하여 사후관리를 지원하는 서비스 재해발생시 인근지역에 대피경보, 대피안내 정보제공 및 접근금지 경보발령 재난재해 범위를 설정하고, 유관기관에게 정보 제공 행정기관 내부 및 유관기관과의 연계(보험회사, 보건, 국세/지방세, 건축행정 등)로 피해자 사후관리
시설물 관리	도로시설물관리	교통시설물관리서비스	도로시설물 유지보수 및 관리를 자동화하고 도로노면의 기상변화, 위험물 감지 등의 도로노면관리를 자동화하는 서비스 안전한 도로운행을 위하여 시설물 유지보수 및 관리자동화 서비스 도로노면에 센서를 내장하여 기상변화, 위험물감지 ,운전자통지, 도로노면 관리자동화 서비스
		가로시설물관리서비스	가로등, 옥외 광고물, 가로수 등 가로시설물에 대한 관리 서비스
		교량안전관리서비스	교량의 상태를 실시간으로 원격 감시·제어하고 이상 발생 시 해당기관에 정보를 제공하는 서비스
		터널안전관리서비스	터널의 상태를 실시간으로 원격 감시·제어하고 이상 발생 시 해당기관에 정보를 제공하는 서비스
	건물관리서비스	건물관리서비스	건축물의 시설운영, 시설물 관리서비스. 시설물 모니터링 및 제어. 지진, 화재 등의 재해를 건물스스로가 감지하고 중앙통제실에서 컨트롤하는 서비스 체육관, 문화시설, 공연장 등 공공건물 및 유비쿼터스도시의 운영 및 관리를 담당하는 통합관제센터에 대한 건물 및 시설물 관리서비스
	하천시설물관리	하천시설물관리서비스	수문, 하구둑 등 하천 시설물을 실시간으로 원격 감시제어하고 이상 발생 시 해당기관에 정보를 제공하는 서비스
	부대시설물관리	옹벽안전관리서비스	옹벽의 금이나 붕괴 등의 안전사고 예방을 위한 옹벽안전관리서비스
		급경사지관리서비스	절개사면의 낙석, 붕괴 등의 안전사고 예방을 위해 절개지에 센서 등의 u-IT기술을 접목하고 관련정보를 사전에 제공하여 급작스런 사고를 방지하기 위한 서비스
	지하공급시설물관리	공동구관리서비스	지하매설물을 공동 수용하는 공동구를 통합GIS와 유비쿼터스 기술을 기반으로 구현하여 누수, 누전, 도로굴착 등에 대한 관리를 통합적으로 시행하고 원격에서 상시 모니터링 함으로 도시 내의 지하매설물과 관련된 업무와 서비스를 효율적으로 개선한 서비스
		상수도시설관리서비스	USN 센서를 이용해 상수도의 유량을 측정하여 유량변화에 따른 누수 모니터링과 상수도 관련 시설물 관리 서비스
		하수도시설관리서비스	유비쿼터스 기술을 활용하여 도시내 하수도 배관 등 하수도 관련 시설물들을 실시간으로 모니터링하고 제어하는 서비스
	데이터관리 및 제공	공간영상관리서비스	매년 촬영되는 항공사진을 디지털화하여 고부가가치의 행정정보 서비스를 창출하고, 사진 및 필름의 장기 보관에 따른 변질방지와 도시행정 수행을 위한 기반정보를 제공하는 서비스
		GIS기반도시정보안내서비스	GIS데이터의 효율적인 공유 및 활용을 위해 각 업무에 공통적으로 필요한 공간데이터를 통합한 공간데이터 웨어하우스를 구축하여 관련 부서업무를 지원 및 과학적인 정책결정을 지원할 수 있는 기반정보를 제공하는 서비스 현장 행정업무를 위한 모바일 GIS서비스 제공, u-서비스제공을 위한 모바일GIS서비스 제공
		도면협업관리서비스	온라인 도면관리와 협업체계를 구현하여, 기존에 방문 및 수기로 제출/관리하였던 공사 관련 도면을 On-Line으로 제출/관리하며 관련 공사에 대한 협업 업무를 On-Line상에서 수행하고 이력정보를 관리하도록 지원하는 서비스
교육	U-유치원서비스	유치원종합정보제공서비스	각종 유치원 정보 안내 및 서비스 제공을 위한 유무선 포털 서비스
		실시간보육현황조회서비스	원격지의 보호자가 유무선 통신 서비스를 기반으로 보육현황을 실시간으로 모니터링 하는 서비스
	U-캠퍼스서비스	캠퍼스종합정보서비스	유무선인터넷과 모바일 통신기반의 유무선포탈과 교내 디지털미디어보드, 키오스크, u-tag기반의 시설물 안내시스템 등을 통해 각종 학교정보 및 편의서비스를 제공하는 서비스 디지털미디어보드(플랫카드/포스터/게시판 등)를 통한 학교이용안내 및 행사홍보 키오스크를 통해 무인으로 캠퍼스 종합정보 및 편의서비스 제공 -캠퍼스 지도 및 경로, 시설물 이용안내, 조회정보를 유무선인터넷 및 모바일로 다운로드 및 출력, 전자화폐 충전, 식권발매, 학사 행정서류 무인발급, 강좌/행사안내 및 등록 등 전시물, 기념물, 건물 등 각종 시설물에 부착된 RFID, ColorzipCode, Barcode 등이 u-Tag를 방문자가 휴대폰 등의 모바일기기로 인식하면 모바일 기기에 해당 시설의 정보를 제공하는 시설물 정보안내
		사물함관리서비스	스마트카드 기반의 지능형 사물함서비스로서 공용 사물함의 경우 스마트학생카드 기반으로 사용자 등록, 이용료 결제, 사물함 이용 종료 시 SMS 전송을 통한 분실방지, 사물함 예약 등이 가능한 서비스
		스마트학생카드서비스	IC Chip기반의 다기능 스마트카드와 각종 연동용 단말기를 기반으로 학생에게 ID, 전자지불, 교통카드, 출결관리, 도서관 출입통제, 인증/보안 등의 원카드 서비스를 제공하고 학교에게는 통합관리서비스를 제공하는 서비스 교실에서 학생카드를 단말기에 인식하여 출결관리서비스를 제공하고, 강의실변경 시 카드단말기를 통해 변경된 강의실안내가 음성이나 문자로 제공되고 교내Kiosk에서 변경된 강의정보를 제공받음 카드에 입력된 학생이나 교직원의 권한에 따라 교내시설물 출입 및 이용을 통제함 카페테레아, 서점, 문구점, 자판기 등 교내편의시설 이용 시 지불결제기능 제공 RF카드기반으로 등하교정보를 원격지보호자가 실시간으로 모니터링하고 이상상황 발생 시 보호자와 교직원에게 실시간통보 스쿨존 등 비상호출 네트워크인프라가 갖추어진 공간에서는 카드에 탑재된 비상호출기능으로 위급상황 시 구조요청 및 위치확인기능 제공
		U-양호실서비스	스마트학생카드기반의 접수와 처방수납, 헬스케어 장비기반의 지능형 건강관리, 심리평가/상담, 원격지 의료진과의 원격상담 등 양호인력의 업무를 지원하는 서비스 이상징후 발생 시 원격지의사와 상담이나 병원진료 예약 학생/교직원과 원격지의사와 실시간 원격건강/심리 상담
		U-스쿨버스서비스	스쿨버스 탑승자의 안전벨트착용현황을 운전자가 실시간 모니터링하여 관리하고 스마트학생카드를 기반으로 학생승하차정보를 원격지보호자가 실시간 모니터링하는 서비스 스쿨버스내 이상상황 발생 시 원격지 보호자에게 실시간 통보
		U-기숙사서비스	출입통제시스템을 기반으로 기숙사 입주학생 및 관리자외출입을 통제하고 기숙사 시설내 홈네트워크서비스와 세탁실, 독서실, 체육시설, 오락실 등의 편의시설예약 및 SMS서비스 등을 지원하는 서비스
	U-교실서비스	U-교실서비스	유비쿼터스기반의 교실내 첨단수업환경제공서비스로서 전자칠판, 전자책상, 전자게시판을 활용한 수업진행 및 디지털교과서와 교육컨텐츠를 통한 멀티미디어학습, 원격지 강사의 실시간 원격강의 등을 제공하는 서비스 학습경과를 원격지 부모가 확인가능 및 교사와 부모 또는 학생간의 실시간 온라인 상담
	원격교육서비스	온라인교육서비스	유무선 방송통신인프라와 PC, DTV, 휴대폰, PS 등 다양한단말기를 기반으로 언제어디서나 디지털교육컨텐츠를 학습하거나 실시간원격강의를 수강할 수 있는 서비스 가정에서 학습가능한 양방향디스플레이장치, 교육지원시스템을 이용한 원격강의 생활권내 특정분야에 재능있는 자가 강사가 되어 개인방송으로 주변학생 또는 주민들의 교육/학습활동 지원 휴대폰, DTV로 교육채널을 다양화하고, 대화형 전자교육시스템 등을 통한 강의 효율강화
		사이버학교서비스	유무선방송통신 인프라를 기반으로 한 온라인 전용 교육과정의 사이버 캠퍼스로서 온라인에서 교육컨텐츠 제공, 학사관리, 커뮤니티, 원격상담 등을 제공하는 서비스
	U-도서관서비스	도서관종합정보서비스	유무선인터넷과 모바일통신기반의 유무선포탈과 도서관내 디지털미디어보드, 키오스크, u-tag기반의 시설물안내시스템 등을 통해 각종 도서관정보 및 편의서비스를 제공하는 서비스 도서관Kiosk를 통해 도서관 종합정보 및 편의서비스 제공 -도서관 및 부대시설지도 및 경로안내, 시설물이용안내, 시설예약, 자료조회/예약/대출/반납, 조회정보를 유무선인터넷 및 모바일로 다운로드 및 출력, 전자화폐충전, 식권발매, 강좌/행사안내 및 등록, 열람실좌석현황 원격조회 등 각종 시설물에 부착된 RFID, ColorzipCode, Barcode 등 u-Tag기반의 시설물정보 안내 방문자가 휴대폰 등의 모바일기기로 시설에 부착된 u-Tag를 인식하면 모바일기기에 해당시설의 정보제공(전시물,기념물,건물 등)
		전자도서관서비스	유무선통신인프라를 기반으로 도서관자료의 온라인검색 및 대출/예약, 디지털화된 자료내용의 온라인 조회 등을 제공하는 서비스 지역내 도서관을 연계하여, 자료대출 신청자위치와 먼 도서관의 자료도 도서관 대출/반납연계시스템을 통해 가까운 도서관에서 전달받고 반납할 수 있는 기능 인접도서관에 대출도서 도착시 SMS, email 등으로 대출신청자에게 정보 제공
		U-서고서비스	책과 서고에 부착된 RFIDTag와 리더, 유무인대출/반납시스템 등을 기반으로 서고이용자가 자료조회시 자료위치를 정확히 안내해주고 자료조회-대출-반납-서고정리에 이르는 서고운영 및 대출반납업무를 지원하는 서비스 자료위치안내서비스 무인대출/반납서비스
		U-열람실서비스	열람실의 좌석현황을 실시간 모니터링하며 열람실 이용자 입실시 좌석을 자동배정하고 입실자가 없는 공간에 대해서는 조명, 냉난방 등을 조절하는 서비스 좌석배정 열람실운영현황안내 좌석별조명관리
		U-이동도서관서비스	차량형 이동도서관이나 지하철역 등 공공장소에 설치된 이동도서관에 RFID 기반의 무인 대출/예약/반납 기능을 제공하고 키오스크나 멀티미디어 기기 등을 통해 도서관의 디지털 자료의 검색, 열람이 가능하도록 지원하는 서비스
	장애인학습지원	장애인학습지원서비스	장애인들을 위한 특수 교육 컨텐츠를 전자점자책, 소리북 등 디지털로 제작하여 제공하고 전용 학습단말기를 제공하는 서비스
문화·관광·스포츠	문화시설관리	문화재보존관리서비스	실외의 대형 목조건물 등 훼손 및 화재 피해가 우려되는 문화재에 대해 RFID 및 센서, CCTV 등을 적용하여 체계적으로 관리 및 이상상황을 실시간 모니터링하는 서비스 USN 등을 활용한 문화재의 화재, 온습도, 건물안전성 실시간모니터링 CCTV를 통해 상시 모니터링 및 이상상황 발생시 발생지역 화면자동 표출 RFID태그를 문화재 주요지역에 설치하고 관리자가 순찰하면서 상황확인 및 관리이력 남김
		문화자산관리서비스	주로 실내에서 관리되는 주요 문화자산(문화재/전시물/도서/기타문화관련자산)관리를 위한 통합시스템을 구축하여 관련 정보 및 관리이력을 효율적으로 관리함 RFID기반으로 주요 문화자산에 태그를 부착하여 입출고관리, 위치관리, 기본정보관리 수행
	문화공간체험	U-전시관서비스	관람객의 편의를 위해 각종 단말과 위치기반으로 각종 정보를 제공하고 다국어서비스를 제공하며, 전시주체는 전시행사관리를 위해 정보DB를 구축하고 고객관계를 강화함 전시물의 정보데이터 베이스구축 및 가상박물관 전시 전시물에 RFIDtag를 부착하고 고정형/휴대형단말기를 이용하여 전시물, 전시관시설, 주변편의시설, 기념품구매 정보제공 관람객의 위치에 따라 자동으로 관련 전시/시설/편의정보를 제공 다국어지원 및 검색기능지원 고객관람/구매패턴 등을 CRM과 연계하여 부가가치 창출
		U-체험관서비스	관람객의 편리하고 효율적인 체험을 위해 고정형/휴대형단말을 통해 개인맞춤형정보/컨텐츠를 제공하고 디지털영상기기, Interactive기기 등 다양한 체험형 설비를 통해 관람객의 적극적 체험을 유도함 각종 시설물, 전시물, 안내문에 부착된 RFID, Barcode 등 u-Tag기반의 시설물 정보안내 관람객의 PDA 등을 통한 정보이용 학습컨텐츠의 실시간 구매 및 다운로드 기능 미디어보드를 통한 학습장 이용안내 및 행사홍보 체험관Kiosk를 통해 종합정보 및 편의서비스 제공(지도, 경로, 이용안내예약, 정보다운로드/출력) 4Dinteractive기기를 통한 사용자의 적극적 체험서비스 주요 체험테마별 설비 및 서비스 -U-파크에 디지털연못, U-파크퍼니처, U-키오스크 등을 설치 -U-홈에 홈네트워크, 홈헬스케어, 홈시큐리티 등을 체험 -U-오피스에 지능형테이블, 홀로그램을 통한 화상회의 체험 -U-레스토랑에 맞춤형 테이블, 맞춤형 램프 등으로 개인맞춤 서비스를 체험 -U-팩토리에 모바일PC를 활용한 생산현장관리 체험 -U-동물원에 디지털동물원 운영 -U-숍에 광고, 디지털매장, 전자쇼핑 구현 -U-선거에 선거유세에서 투표까지 과정을 체험 -신재생에너지의 현황과 미래를 볼 수 있는 에너지전시관 및 풍력발전단지 등 신재생에너지체험 및 교육학습공간 제공 -지역의 전통생활 및 문화를 웹상의 가상공간에서 재현하고 전통문화의 체험과 탐색 -생활기상을 비롯한 사이버가상 테마파크개발운영, 기상정보를 실생활에 활용하는 사례발굴과 안내
		U-컨벤션서비스	원활한 행사진행과 관람객의 편의를 위해 종합정보제공, 홍보/광고, 실시간 통역서비스 등을 제공함 다양한 IT기술을 이용한 첨단컨벤션서비스(e-ticketing,홍보/광고) 미디어보드, Kiosk, PDA 등을 통한 전시내용, 위치, 관람정보제공 실시간통역서비스 지능형 안내로봇을 활용한 적극적 정보/편의 제공
	문화정보안내	문화정보종합안내서비스	시민들을 위해 웹, Kiosk, PDA 등 다양한 매체로 문화행사, 공연 등의 문화정보를 종합적으로 제공하고 보다 적극적인 사용자에게는 개인맞춤형 서비스 제공 웹, PDA/핸드폰, 키오스크, U-포스터 등을 통해 공연, 세미나, 전시회 등의 문화행사, 문화정보 등 제공 티켓구매/예매지원, 좌석관리서비스 제공 개인취향 및 행사참여 이력 등을 기반으로 개인맞춤형서비스 제공
	U-관광정보안내	U-투어서비스	도시내 도보이동 관광객뿐만 아니라 차량이동관광객에게도 관광지, 숙식편의시설 및 예약, 쇼핑/쿠폰정보, 위치정보, 기상정보 등을 고정형/휴대형단말을 통해 다국어로 제공하는 서비스 CNS(CarNavigationSystem), GPS, RFID태그, 칩스캐닝, 휴대용단말기, 네비게이터 등을 통하여 관광지, 위치/기상, 숙식편의 제공 및 쇼핑정보를 다국어로 제공 도시내 예술작품감상 및 판매, 관광루트개발 및 이동경로제공, 예술품정보 등 제공 도시의 관광코스를 개발하고, 관광루트별 전자칩을 설치한 모바일단말기를 통해 길안내 및 자동설명 현재 관광지의 일정범위내에서 사용가능한 쿠폰 또는 예매권을 발행받아 사용하는 서비스 차량내 내비게이션시스템과 연동하여 이동중인 차량의 위치기반으로 주변의 관광지, 음식점, 호텔 등의 정보제공 유무선기반으로 예약가능한 숙박업소, 음식점, 레저시설 등의 예약현황 통합조회 및 예약 개인위치기반으로 주변시설에 대한 맞춤형 예약 지원
		시티투어버스정보서비스	시티투어버스 이용자에게 정류장에서의 버스정보제공을 시작으로 버스내에서는 다양한 매체를 통해 관광코스내에서의 관광정보를 위치기반으로 제공하는 서비스 GPS기반의 실시간 관광정보안내와 버스내에서 휴대인터넷을 통한 실시간정보 접속 버스내에서 3D가상공간 및 홀로그램으로 다양한 관광정보와 관광코스 안내 정차지에 설치된 단말기를 통해 버스의 노선과 버스도착시간 등을 조회
		관광지실시간영상공유서비스	국내와 외국관광지의 실시간 영상을 공유하여 타지역 및 외국에 대한 간접 체험기회를 제공하고, 타지역/외국에 국내관광지를 홍보하는 서비스 PTZ카메라를 이용하여 국내 및 해외관광지 실시간영상 제공 유료사용자의 경우, 특정시간동안 카메라를 제어하여 보다 편리한 영상조회 가능 관광지의 영상에 해당지역의 관광정보를 연계하여 제공하고 관광상품구매, 예약 등과도 연계
		U-방명록서비스	주요 관광지에 관광정보안내 등 다목적의 Kiosk를 설치하여 관광객이 이를 통해 관광지에서의 경험, 느낌, 사진 등을 기록하면 이 컨텐츠를 시간별, 관광지별로 종합하여 관광객에게 제공하는 서비스 도시 및 전국 주요관광지에 관광정보종합안내Kiosk를 설치(관광정보종합안내서비스)하며 관광객의 경험, 느낌, 사진 등 방명록을 기록할 수 있는 기능 추가 관광객이 다양한 장소에서 남긴 방명록을 자동으로 앨범 등의 형식으로 컨텐츠화 함 관광객은 관광도중 또는 종료후 e-mail등을 통해 관광일정을 종합적으로 회상할 수 있는 방명록 컨텐츠를 수신함
		관광정보종합안내서비스	관광객들을 위해 웹, Kiosk, PDA 등 다양한 매체로 관광지정보, 시티투어버스 등의 관광정보를 종합적으로 제공하고 보다 적극적인 사용자에게는 개인맞춤형 서비스 제공 웹, PDA/핸드폰, 관광안내부스의 키오스크 등을 통해 관광지정보, 시티투어버스정보 등 제공 개인취향 및 관광지방문이력 등을 기반으로 개인맞춤형서비스 제공 산악지역과 기상변화가 심한 관광지에 기온, 습도 등의 센서를 주요 지점에 설치하고, USN으로 구현하여 지역내 관광객에게 실시간 기상정보 제공
	U-공원	공원정보안내서비스	공원이용자에게 다양한 고정형/휴대형단말을 통해 공원의 주요정보를 제공하고, CCTV를 통해 생태환경 등의 교육적 영상을 제공하는 서비스 키오스크, 스크린월(screenwall) 등을 통하여 공원, 광장, 유원지 등에 대한 시설정보, 생태정보안내, 예약 개인별 모바일단말기를 이용하여 주요 정보활용 전용 CCTV 등을 통한 공원생태환경 영상제공 공원내 고객유실물에 대한 사진 및 특성 등 등록후, 이용객이 공원내 키오스크에서 간편히 조회할 수 있도록 함
		공원시설통합이용서비스	팔찌형 등의 RFIDtag를 이용하여 출입부터 시설일괄이용, 상품/식음결제(선불or후불), 락커이용, 유모차/휠체어 등 이동시설대여, 미아찾기 등의 편의서비스를 통합 제공 테마파크 등 유료공원 입장시 팔찌형 등의 RFID기반태그 착용, 필요시 현금충전(또는후불) 공원내 시설이용 및 구매시 고정식/휴대형RFID리더를 이용하여 통합인증 및 결제 혼잡한 공원내 미아방지를 위한 위치인식기반 미아찾기서비스 제공가능 공원퇴장시 정산 및 소지품 회수
	U-놀이터	U-놀이터서비스	다양한 유비쿼터스기술과 기기를 이용하여 어린이들이 보다 흥미롭게 놀 수 있으며 교육적인 효과 또한 제공할 수 있는 첨단놀이터 구축 U-기술, LED조명, 멀티미디어, 센서 등 첨단IT기술을 적용한 어린이놀이터 U-서비스체험, 놀이, 게임, 교육을 통해 흥미있는 공간 연출 디지털징검다리, 놀이기구, 사이버투어, 암벽놀이, 디지털놀이판, 멜로디의자 등 설치
	U-리조트	U-리조트서비스	리조트이용의 편의를 위해 이용객의 회원카드를 기반으로 시설사용, 결제 및 부가서비스를 통합 제공하며, 리조트측에서는 보다 적극적인 리조트 이용을 유도하기 위해 CRM서비스를 제공함 회원카드(도시원카드연계가능)로 부대시설인증, 출입,선/후불정산, 입실편의서비스, 엔터테인먼트서비스 제공 회원관리 및 우대할인/마일리지제공,예약서비스 제공
	U-스포츠	U-생활체육서비스	러닝, 인라인스케이트, 자전거 등 생활체육에 참여하는 시민에게 자신의 운동기록에 대한 정확한 데이터 뿐만 아니라 운동시 건강정보까지 함께 제공함으로써 건강하고 안전한 생활체육을 즐길 수 있도록 지원하는 서비스 운동관리서비스: -전체 운동기록 및 구간별 기록을 측정하고 웹사이트에 업로드하여 기록관리 및 공유 -걷기, 뛰기, 경사도가 반영된 활동량 측정 -운동코스이탈, 역주행 등을 관리하여 충돌 및 사고방지 -운동종료후 SMS을 통한 운동기록 통보 건강 및 안전관리시스템 -운동자의 심박수 실시간모니터링 및 알람 -운동자의 낙상, 충돌, 실신 등 이상상태를 실시간 모니터링 -응급상황발생시 응급구조팀에 사고위치 및 건강정보 전송
		U-골프서비스	골프경기에 특화된 U-리조트 서비스로서, 이용자에게는 경기정보와 함께 다양한 부가편의서비스를 제공하고 운영자에게는 효율적 경기관리와 광고 등을 통한 부가수익을 제공하는 서비스 U-리조트서비스에 골프장을 위한 특화서비스 추가 고객에게 코스, 경기속도 정보를 제공하여 만족스러운 플레이를 지원하며, 게임 중에 식음료 주문 및 예약, 응급호출 등이 가능하여 골프장을 편리하게 이용할 수 있도록 함 운영자에게 골프장 전체의 경기진행 모니터링을 제공하여 효율적 경기관리를 가능하게 하며, 웹패드광고를 통해 부가적 수익창출이 가능하도록 함 LCD라커, 키오스크, 경기실황Display를 통한 통합경기정보제공 카트 위치관리를 통한 효율적 카트 운영
		U-스키서비스	스키에 특화된 U-리조트서비스로서, 이용자의 편의와 안전을 위해 통합이용카드, 환경정보, 사고관리서비스를 제공하고 특히 선수들에게는 경기 중 동작, 경로, 기록 등을 관리하는 특화된 훈련도우미 서비스를 제공함 RFID태그 등을 이용한 리프트, 장비렌탈, 식음시설통합 이용 스키장의 기상상태 등 이용에 영향을 줄 수 있는 환경정보제공 CCTV와 센서 등을 활용하여 사고가 발생할 수 있는 리프트, 사각지대 등에 대한 안전관리 선수들을 위한 경기 중 동작, 경로 모니터링 및 경기기록 측정서비스(오스트리아Abatec社)
물류	생산이력추적관리	U-Factory	제공품에 RFID태그를 부착하여 생산/조립공정과정을 실시간으로 모니터링 및 제어하며, 완제품에 대한 전체 생산공정이력을 추적/조회할 수 있는 서비스
		U-축사	RFID를 활용하여 축산농가에서 생산하는 축산물의 생산 농가, 사육방법, 출하시기, 방역정보 등 생산 이력정보를 자동으로 기록, 저장하여 축산물의 이력정보를 실시간으로 공유 및 추적할 수 있는 서비스
		U-Farm	온도, 습도, 일사량, 토양 수분 센서를 통해 농작물의 생장환경을 실시간으로 모니터링하여 최적 환경을 조성하며, 이러한 환경요소 및 농작물의 생장이력을 자동으로 기록하여 조회/추적할 수 있는 서비스
		U-양식장	양식장에 다양한 센서환경을 구축하여 수산물의 양식환경을 실시간으로 모니터링하여 최적 환경을 조성하며, 양식과정의 모든 이력을 자동으로 저장하여 조회/추적할 수 있는 서비스
	U-물류센터	물류창고입출고관리서비스	농수축산물 및 화물의 다양한 물류단위별로 RFID태그를 부착하여 물류창고 입출고과정에서 부착된 RFID정보들을 다중인식하여 입출고 검수를 자동으로 처리하는 서비스
		지능형재고관리서비스	RFID를 이용하여 물류창고내의 재고 변동을 자동으로 처리하며, 재고현황 및 저장위치를 실시간으로 모니터링하여 최적의 재고관리를 지원하는 서비스
		지능형피킹/패킹서비스	RFID를 이용하여 피킹 단위를 자동으로 인식/분류 처리하며, 혼합 물류단위 패킹과정에서 검수를 자동으로 처리하는 서비스
	U-운송	화물차량관리서비스	화물차량의 운행 현황, 가용상태, 위치 등 실시간으로 모니터링하여 다수의 사이트 간의 화물 운송을 위한 화물차량의 배차를 최적화 하여 운송의 효율성을 제고할 뿐만 아니라 화물차량의 안전점검기록 및 차량상태 등을 파악하여 운행시 문제 발생 방지하는 서비스
		최적운송경로안내서비스	실시간으로 제공되는 교통정보와 GPS를 이용한 실시간 화물차량의 위치정보를 기반으로 최적경로 안내 서비스
		수입화물통관서비스	RFID를 이용하여 수입화물의 반출입·보세운송 등 관련 정보의 공동 활용을 통해 관세청·수입화주·보세운송인·보세창고운영인 등의 수입 항공화물 Process를 효율화하는 서비스
		화물운송추적서비스	화물에 부착된 RFID정보와 화물차량의 연계 및 GPS 기반의 화물차량 위치 확인으로 화물 운송현황 및 위치 등을 실시간으로 추적/조회할 수 있는 서비스
	U-배송	무인우편/택배서비스	택배 보관함을 이용하여 입주민 부재 시에도 택배나 소포 수령, 택배 발송을 할 수 있게 서비스 제공자와 고객을 연결해 주는 무인 화물 중계 서비스
	유통이력추적조회	농수축산물이력추적서비스	RFID를 이용하여 농수축산물의 생산/사육/양식 이력부터 최종 소비자에게 판매되기까지의 모든 물류/유통 이력정보를 실시간으로 추적/조회하는 서비스
		제품이력추적서비스	RFID를 이용하여 가전제품, 의약품, 식품 등 다양한 제품에 대해 생산공정뿐만 아니라 물류/유통 전체의 이력정보를 실시간으로 추적/조회할 수 있는 서비스
	U-매장	도소매자동입출고관리서비스	RFID를 이용하여 Market, 할인마트 등 다양한 소매점에서의 화물/제품의 입출고 검수를 자동으로 처리하는 서비스
		지능형매장관리서비스	RFID를 이용하여 매장 선반에 진열된 제품의 재고 현황을 실시간으로 모니터링 및 관리하고, 진열 선반의 가격 표시를 전자화하여 중앙 통제하에 효율적으로 변경관리할 수 있는 서비스
	U-쇼핑	개인맞춤형쇼핑정보서비스	구매 이력을 기반으로 개인의 특성 및 취향에 따라 맞춤형 상품 및 쇼핑정보를 자동으로 제공하고, 구매 대상 상품에 대해서는 이력정보 및 상세정보를 쉽게 확인할 수 있는 서비스
		전자지불서비스	칩이 내장된 전자화폐를 리더기에 인식시킴으로써 현금이나 수표, 신용카드를 대신하여 자동 결제하는 서비스
		U-전자상거래서비스	PC, 휴대폰, PDA, 디지털 텔레비전 등 인터넷에 접속 가능한 기기나 모바일 디바이스를 통해 고객에게 정보제공이나 서비스를 전달하고 거래나 결재 수행을 지원하는 서비스
		U-고객관리서비스	고객카드를 기반으로 정확한 구매이력 관리를 통해 마일리지적립 및 할인쿠폰 제공 등 다양한 추가서비스
근로고용	고용정보서비스	개인취업지원서비스	지역/산업단지별, 역세권별, 직종별 등 다양한 일자리정보를 비롯하여 온라인 구직신청, 이메일 입사지원, 맞춤정보 서비스, 구직활동 내역 조회/출력, 메일링 서비스 등의 취업지원 서비스
		기업채용지원서비스	기업에게 지역별, 직종별, 전공계열별 등 다양한 인재정보를 비롯하여 온라인 구인신청, 인재정보관리, 맞춤정보 서비스, 북마크, 대학교/직업훈련학교 추천 의뢰 등의 채용지원 서비스
		고용동향정보서비스	직업심리검사, 나에게 적합한 직업찾기, 자료탐색, 취업가이드, 직업지도프로그램, 사이버직업상담, 직무분석자료 등 직업정보 서비스와 Job Map, 취업나침반, 일자리/인재 동향, 통계간행물/연구자료 등의 고용동향 서비스
		인력시장지원서비스	일용직 근로자들의 공급과 수요를 실시간으로 매칭하고 인터넷 및 모바일을 통한 근무일시와 장소 등의 관련정보 통지하며 근로자는 휴대폰이나 개인단말기 등으로 U-인력시장지원시스템 서버에 통지하고 근무하는 서비스
		u-라이센스카드서비스	기관별 자격증 및 교육 인증서를 하나의 카드에 담아 키오스크나 모바일을 통해 증명하는 서비스
	U-Work 서비스	원격회의서비스	기업내의 본사와 지사간에 안전하게 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 고품질 영상회의 및 관견협업환경을 제공하는 서비스 사용자상태 정보기반의 즉석 영상회의, 휴대폰 및 전화단말 통화지원, 문서공동작업/프레젠테이션제공, 웹/문서/애플리케이션공유서비스 등
		원격협업서비스	원격지의 근무자와 기업내의 근무자가 자유롭고 안전하게 협업을 진행할 수 있도록 기업에 적절한 어플리케이션을 제공하고 이를 언제 어디서나 안전하게 접근할 수 있도록 하는 서비스 통합메시징, Presence기반통화서비스, VPN이용접속서비스, 문서공유 및 웹공유를 통한 협업서비스, 실시간메일 송수신서비스 등
		U-사무공간서비스	시간장소에 구애받지 않고 이동 중에도 노트북컴퓨터나 PDA 등을 이용하여 회사내의 정보를 신속하게 확인할 수 있는 서비스 모바일포털을 통한 다양한 모바일 오피스수용, 유무선통합메일을 통한 사내메일송수신, 회사내 공지사항 SMS확인, 파일공유서비스 장소에 상관없이 네트워크인증만으로 자신의 업무환경 조성 비행기의자, 호텔창문 등에 설치된 디스플레이가 인증만으로 개인단말기로 변환되고, 자신에게 필요한 정보 이용
		U-Work센터활용서비스	교통이 편리하고 인구유동량이 많은 지역에 다양한 근무자들이 자유롭게 업무를 수행할 수 있는 공동의 사무환경을 구축하여 회사 밖에서도 신속하게 업무나 회의를 할 수 있는 물리적인 환경을 제공하는 서비스 사무용IT자원 제공, 다양한 협업어플리케이션제공, 원격영상회의 공간제공 및 솔루션제공, 스마트보드/빔프로젝터/영상회의카메라대여 등
		기업통합카드서비스	RFID를 이용한 카드로 출입관리, 주차관리, 근태관리, 식당이용 및 자판기에 이용할 수 있는 서비스
		U-Print pole서비스	휴대폰, PDA 등을 통해 고객이 해당 서류 및 출력물을 원하는 장소에서 출력하는 서비스
		U-Office임대서비스	소호창업자나 외국지사 파견 근무자 등을 대상으로 지능화된 오피스 공간을 임대해 주고, 경영 및 재무 법률 상담 등의 컨설팅을 병행하여 제공하는 서비스
	산업활동지원	창업지원서비스	창업서류 처리를 인터넷 및 모바일로 처리하고 한 번의 창업신청으로 연관된 업무가 자동적으로 진행되는 서비스
		지역산업체지원서비스	지역내 중소기업, 영세업체에 대한 산업체정보를 관리하여 기업을 대상으로 산업체시설정보를 실시간으로 제공하고 자치단체간의 구인/구직데이터베이스를 통합관리하여 지역주민에게 구인/구직정보 제공하는 서비스 각 자자체의 중소기업지원센터에 입주한 업체에게 창업자금, 벤처집적현황 등 정보제공
		지역업체협력지원서비스	입주기업들과 거래하고 있는 부품제작관련 업체정보(생산품목,위치,연락처등)를 통합하고 이를 공유하는 체계 마련하는 서비스 협력업체들도 포털을 이용해 자사정보를 공유하여 다양하게 이용될 수 있도록 함 국책기관, 대학 등의 연구성과와 기업의 기술니즈간의 연계를 지원하는 기술중계서비스 공동구매를 위해 필요한 부품의 수량, 일정, 사양 등을 쉽게 공유할 수 있는 Web환경제공하는 공동구매서비스
	산업안전관리	위험업무원격지원서비스	위험한현장에서 근로자의 경험에 의지한 업무들을 센서네트워크를 기반으로한 환경에 의해 작업자의 위치 및 건강상태 파악하고 위험을 간지하는 서비스 사용자에 탑재된 온도센서 등과 같은 감지센서와 N/W카메라를 통한 현장정보를 BackOffice에서 모니터링하여 현장작업지시 및 위험감지
		위험사업장안전관리서비스	산업현장에서 산업재해의 위험요소에 대한 감지, 실시간 모니터링, 경보체계 확립을 통해 산업현장의 온도, 풍향, 풍속 등 작업환경과 작업자 간의 지능적 상호작용이 가능하도록 하여 작업자간의 안전을 고려하는 작업 환경 구축 서비스
기타	홈매니지먼트서비스	홈오토메이션서비스	홈서버를 통해 세대내부의 조명, 에너지, 환경, 정보가전 및 기타설비 등을 통합으로 모니터링/제어하여 관리하고 모바일디바이스와 연동해 원격에서 관리를 가능하게 하는 서비스 조명제어서비스 -실별조명제어, 일괄소등 ,디밍제어 에너지제어서비스 -냉난방기기통합/원격제어 -생활모드제어(외출,귀가,취침,기상,방범) 환경관리서비스 -통합공조기제어 -공기질을감시해자동으로환기및공기청정기작동 정보가전 및 기타설비제어서비스 -정보가전(세탁기,냉장고,식기세척기등)통합/원격제어 -전동커튼제어,도어록제어
		화상전화서비스	세대 및 단지를 연결하는 VoIP, 국선을 이용하여 세대내부, 단지내/외부의 음성/화상통신을 지원하는 서비스 세대내부화상전화서비스 -주방TV폰, 욕실TV폰, 실별TV폰을 연동하여 화상전화서비스 제공 단지내부전화서비스 -공용현관과 연동하여 방문자와 영상통화서비스 -경비실인터폰연동, 무인택배전화기연동 단지외부전화서비스 -국선, VoIP와 연동해 외부통화를 지원하는 서비스
	외부연계서비스	엘리베이터콜서비스	공용엘리베이터와 세대기, 공동현관 등과 연계하여 엘리베이터의 위치를 모니터링하거나 사전에 엘리베이터를 호출하여 대기시간을 줄이는 서비스 세대기엘리베이터 호출서비스 -현재엘리베이터위치검색, 세대기를 통해 엘리베이터호출기능 공용현관엘리베이터 호출서비스 -공용현관 진입시 주민통합카드로부터 거주민을 식별해 엘리베이터를 호출하는 기능
		주차장연동서비스	단지내 공용주차장을 세대기와 연동하여 방문객/거주민차량의 출입을 알리고 주차장의 이용과 관련된 사항을 관리하는 서비스 차량출입관리 -방문객이나 거주자의 차량이 출입시 알림 -차량의 출입정보를 기록하고 조회 가능 주차장모니터링 -공용주차장에 설치된 CCTV로 주차장내부 및 거주자에게 할당된 주차지역의 모니터링 주차장관리 -주차장이용요금 사용이력 등을 입력, 조회
		홈엔터테인먼트서비스	홈게이트웨이를 통해 외부에서 전송되는 멀티미디어데이터, 디지털컨텐츠를 세대내부로 쌍방향으로 전송해 거주민이 세대내부에서 즐거움과 재미를 느끼도록 하는 서비스 IPTV서비스 게임서비스
	단지관리서비스	단지통합관리서비스	세대 내부의 오토메이션 설비와 공용부의 공용 설비, 시스템, 인프라를 연동해 통합관리를 하여, 거주자에게는 세대기를 통해 공용부의 통합조회를 제공하고 관리자에게는 편리하고 효율성있는 관리 서비스 제공
		단지안전관리서비스	세대 내/외부에 설치된 안전관리 시스템을 연동하여 관리실이나 도시통합운영센터에서 모니터링, 관리를 지원하며 위급 사항 발생시 관련 부서와 유관기관을 연계시켜 신속한 대응을 가능케하는 서비스
		단지커뮤니티지원서비스	단지 내 구축된 네트워크 인프라를 관리하고, 단지내 포탈 서비스를 통해 주민 공동체 활동을 지원하고 관리하는 서비스
		통합주민카드서비스	입주민정보를 저장해 인증을 통해 출입통제, 부대시설연계, 전자지불 등의 서비스를 하나의 카드로 통합하여 제공하는 주민카드서비스 출입통제서비스 -세대/공용부현관출입, 공용주차장출입, 출입제한구역의 주민인증기능 부대시설연계서비스 -무인택배 ,감성벤치 등의 시설물에서 거주자식별 및 서비스제공 -공용부피트니스센터,상업시설등의이용 전자지불서비스 -상업시설 이용시 지불 기능 -마일리지
	U-아티팩트(artifact)서비스	건축외관디지털조명서비스	건물의 외벽에 LED, LCD 전광판이나 프로젝터를 설치하여 미려한 도시경관을 제고하는 조명 패턴을 표출하여 지역의 랜드마크로서 건물의 이미지를 제고시키는 서비스
		미디어보드서비스	가로공간, Open Space 등에 LED, LCD 전광판이나 전자게시판을 설치하고 미려한 영상 패턴을 표출하거나, BIS(Building Information System)와 연동한 다양한 정보를 표현하고 전달하는 서비스
		감성벤치서비스	가로공간, 공용부에 엔터테인먼트 기능과 서비스 연계 기능을 하는 감성 벤치를 설치하고 멀티미디어 데이터와 양방향 디지털 컨텐츠를 제공하는 서비스
		음악분수서비스	도시공간, 가로공간 및 연못, 하천 등에 설치 가능한 음악분수를 통해 도시 미관을 제고시키는 서비스
		디지털징검다리서비스	하천변, 도시내 수변 공간에 센서와 감성조명, 음향시스템이 설치된 징검다리를 설치하고 보행자가 징검다리를 건널 때 맞춤형 음향과 감성조명을 제공하는 서비스
		디지털시설물경관서비스	디지털포이어[digital foyer],키오스크, 스마트포스트, safe-easy crosswalk, 미디어프라자, 플렉싱스크린, 디지털트리[ditital-tree], 디지털치유산책로[digital therapy promenade], 영상캐노피[media canopy], smart garbage, 인터넷폰부스[internet phone booth], 전자우체통, 전자신문가판대, 디지털플라워, 자동소화전[auto hydrant] 등
	U-테마거리서비스	첨단거리 기술체험 서비스	건축물 위주의 유비쿼터스체험관 대신 가로공간에서 다양한 유비쿼터스체험 기회 및 공간시설 제공하고 장애인 등도 불편 없이 산책 할 수 있는 환경을 제공하는 서비스
		특화산업거리 서비스	지역산업 육성과 영세 상인의 홍보강화를 위해 특화산업거리를 조성하고 특화산업정보, 상거래, 쇼핑, 관광, 숙박, 교통, 먹거리 정보를 포함한 종합적 정보제공을 가로공간에 구현하는 서비스

【별표 7】 도시기반시설물의 종류 및 관리주체

도시기반시설물의 종류 및 관리주체

구분	종류(등급)	관리주체	비고
도로	고속국도	국토해양부장관 (한국도로공사 사장대행)	도로법 제9조
	일반국도	국토해양부장관 (시 관내는 해당 시장)	도로법 제10조
	특별 ·광역시도	특별 ·광역시장	도로법 제11조
	지방도 (국가지원 지방도)	도지사	도로법 제12조
	시도	시장	도로법 제13조
	군도	군수	도로법 제14조
	구도	구청장	도로법 제15조
하천	국가하천	국토해양부장관	하천법 제8조
	지방하천	시 ·도지사
항만	지정항만	국토해양부장관	항만법 제23조
	지방항만	시 ·도지사
공항	비행장 및 항행안전시설	국토해양부장관, 비행장 또는 항행안전시설 관리자	항공법 제80조
	공항시설	국토해양부장관	항공법 제105조의2
물류업무설비	물류단지	시행자, 입주기업체협의회	물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제53조
가스 ·열공급설비	고압가스시설	지식경제부장관	고압가스 안전관리법 제26조의3
방송 ·통신시설	전기통신설비	방송통신위원회	전기통신기본법 제31조
유류저장 및 송유설비	특정소방대상물의 방화관리	특정소방대상물의 관계인	소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조
	공동방화관리	소방본부장 또는 소방서장	소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제21조
방조설비	국가관리방조제	농림수산식품부	방조제관리법 제6조
	지방자치단체 관리방조제	시 ·도지사
폐기물처리시설	폐기물처리시설관리	환경부장관, 폐기물처리시설을 설치 ·운영하는 자	폐기물관리법 제31조
철도	도시철도 시설물	국가 또는 지방자치단체	도시철도법 제15조
수도	상수원보호구역	시장 ·군수 ·구청장	수도법 제8조
	소규모 급수시설	시장 ·군수 ·구청장	수도법 제8조
	수도시설	일반수도사업자의 수도시설관리자	수도법 제21조

【별지 제1호 서식】	(앞쪽)
유비쿼터스도시건설사업시행자 지정신청서	처리기간
30 일
신청인	성명(법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)
주민등록번호 (법인등록번호)		전화번호
주소
시행자지정신청내용
신청구역	사업시행지역명		시행면적	㎡
위치
사업계획	사업목적
사업개요
시행기간	. . .~ . . .	시행방법
자금계획(천원)	(총액) 천원	(내자) 천원	(외자) 천원
「유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률 시행령」 제17조제1항의 규정 따라 위와 같이 유비쿼터스도시건설사업시행자 지정을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명또는인)
국토해양부장관	귀하
특별시장, 광역시장, 시장, 군수 또는 특별자치도지사
구비서류 1. 사업계획서	수수료
없음
2. 「유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률」제12조1항과 2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 확인할 수 있는 서류 3. 축척 2만5천분의 1 또는 5만분의 1의 위치도
	210mm×297mm(보존용지(2종)70g/㎡)

(뒤쪽)
이 신청서는 다음과 같이 처리됩니다.
신청인				처리기관(담당부서)
				국토해양부(유비쿼터스도시 담당부서)
				시·군(유비쿼터스도시 담당부서)
	신청서작성					▶	접수
							▼
							검토
							▼
	지정서교부	◀					결재
							▼
							대장정리

【별지 제2호 서식】
제 호 유비쿼터스도시건설사업시행자 지정서 사업시행자 주소 법인의 명칭 대표자성명 귀하를 유비쿼터스도시건설등에관한법률 시행령 제17조의 규정에 따라 아래와 같이 유비쿼터스도시건설사업시행자로 지정합니다. 위치 면적 ㎡ 사업명 사업개요 시행자 지정조건 년 월 일
국토해양부장관		[인]
특별시장, 광역시장, 시장, 군수 또는 특별자치도지사
	210mm×297mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

【별지 제3호 서식】
유비쿼터스도시건설사업시행자 지정대장
일련번호	시행자지정일	시행자				위치	시행면적 (㎡)	사업기간	시행방법	총사업비 (천원)
		주소	성명	생년월일 (법인등록번호)	전화번호
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	. . .							. . . ~ . . .
	210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)

【별지 제4호 서식】								(앞쪽)
공사완료보고서													처리기간
													30일
1. 보고자	주소
	성명 (법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명
	주민등록번호(법인등록번호)									전화번호
2. 보고내용
구역명
지정목적
위치
면적		㎡
시행기간		. . .~ . . .
토지이용계획
용도별
면적(㎡)
기반시설개요
시설명
개요
유비쿼터스도시건설등에관한법률 제16조제1항의 규정에 따라 위와 같이 보고합니다. 년 월 일 보고자 (서명또는인)
국토해양부장관 특별시장, 광역시장, 시장, 군수 또는 특별자치도지사				귀하
구비서류 1. 준공조서(준공사진 포함)															수수료
															없음
2. 준공설계도서 3. 법 제16조제3항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의에 필요한 서류 및 도면 4. 법 제18조에 따른 유비쿼터스도시기반시설의 귀속조서 및 도면 5. 그 밖에 준공검사에 필요한 서류(공간정보 전자문서 등 포함)
							210mm×297mm (보존용지(2종) 70g/㎡)

이 신청서는 다음과 같이 처리됩니다. (뒤쪽)
보고자				처리기관 (담당부서)
				국토해양부 (유비쿼터스도시 담당부서)
				시·군 (유비쿼터스도시 담당부서)
	완료보고서작성					▶	접수
							▼
							준공검사
							▼
							관계기관협의
							▼
	준공검사증명서교부	◀					공사완료공고

【별지 제5호 서식】
제 호 준공검사증명서 사업시행자 주소 상호명 대표자성명 귀하가 시행한 유비쿼터스도시건설사업에 대하여 「유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률」 제16조제2항의 규정에 따라 아래와 같이 준공인가를 하고 본 증서를 교부합니다. 1. 사업의 명칭 2. 사업시행지역의 위치 3. 준공연월일 . . . 4. 준공인가사항(유비쿼터스도시기반시설 및 유비쿼터스도시서비스 내역) 년 월 일
국토해양부장관 특별시장, 광역시장, 시장, 군수 또는 특별자치도지사		□
	210mm×297mm (보존용지(2종) 70g/㎡)